문서번호	설비부-226
결재일자	2020.1.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김현욱		여인웅	01/07 임정규
협조

「남부도로사업소 청사 신축 전기공사」

관급자재 자체 검사계획 보고

2020. 01.

도시기반시설본부

[설 비 부]

「남부도로사업소 청사 신축 전기공사」

관급자재 자체 검사계획 보고

『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』관급자재(LED경관조명기구)에 대해 감리단에서 제출된 자체 검사 계획서를 아래와 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

삼우(도시기반) 제20-0106호(2020.01.06.), 관급자재 검사기관 변경 요청 검토 보고

Ⅱ		관급자재 구매현황

공 사 명 :『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』

계약건명 : 조명등기구 2종 구매

계 약 자 : 선호라이팅(주)

계약내역 : LED경관조명기구 12W × 62EA

검사기관 : 한국건설생활환경시험연구원

납품기한 : 2020.01.12.

Ⅲ		자체 검사계획

자체 검사(검사기관 변경) 사유

□ 조달청 조달품질원 공고 제2019-4호「조달청 검사에 관한 사항」중 2.의 라항(검사기관 변경)의 규정에 의거

5) 감리계약이 체결되어 검사를 수행하는 경우

6) 납품지연 등으로 공사의 차질이 발생, 후속공정의 지장 또는 민원이 발생된 경우이고

□ 상기 물품은 2020.01.10.일 현장 설치예정으로 당초 검사기관인

「한국건설생활환경시험연구원」의 검사시 납품일정을 맞출 수 없는         실정으로 검사기관을 변경하고자 함

자체 검사 계획서

□ 검사상대자 : 선호라이팅(주)

□ 검사물품현황

- 경관조명(LED경관조명기구)/ 납품요구번호 12-19-2-82236-00

- 수량 및 규격 : 62등 /SH-L12-BB,12W

□ 검사원 및 예정일

- 검사예정일 : 2020.01.09

- 검 사 원 : 건설사업관리기술자(전기) 김석현

□ 검사기준

- 검사수준 : KS Q ISO 2859-1 보통검사(11),AQL = 6.5 %

- 검사수량 : n=2

감리단 검토의견

□ 건축공정 차질 발생 및 후속공정 지장이 있음

□ 현장 여건상 검사기관을 조달청 전문기관 검사(한국건설생활환경시험연구원)에서 수요기관 검사(서울특별시 도시기반시설본부)로 변경이 적정하다고 사료됨

Ⅳ		검토의견

건설사업관리단에서 제출한 검사기관 변경 요청 사항에 대하여 검토결과       공사일정상 불가피한 것으로 판단하여 변경하는 것이 타당하다고 판단되어       총무부에 검사기관 견경을 요청하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.