＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	********************
(경유)	************
제목	준공지연에 따른 공정관리철저 및 자료제출(독촉) 안내

1. 우리사업소와 계약하여 공사중인 「서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」관련, 귀사의 귀책사유로 준공지연되어 귀사 및 공사주변 아파트입주민의 피해가 가중되고 있기에 아래와 같이 안내하오니 적극 임하여 주시기 바랍니다.

가. 공정관리 철저

- 공정관리를 철저히 하여 준공지연일 최소화 노력(지체상금 부과중)

나. 준공전 설계변경자료 제출

- 기제출자료: 숏크리트 공정

↳ 행정지원과-28009(2019.12.24.)호로 회신하였으며, 이의신청기한(2019.12.30.) 경과(장비이동비 견적서 미제출)

- 공사중 발생한 물량변경 내용 및 **************************************************************************** 등을 공문으로 준공계 제출 5일전까지 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서부수도사업소장
★주무관	방만천		행정관리팀장	엄태현		행정지원과장	01/07 김맹순
협조자
시행	행정지원과-454	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)