문서번호	설비부-265
결재일자	2020.1.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	01/08 임정규
협 조

- 중랑물재생센터 총인처리시설 설치사업 -

통신공사 실정보고 승인검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 01.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 중랑물재생센터 총인처리시설 설치사업 -

통신공사 실정보고 승인검토

『중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사』관련 총인처리시설 CCTV 추가 등 사용자 요청사항 반영 등에 대하여 건설사업관리단으로부터 실정보고가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

******************************

********************************

***************************************

*************************

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사

공사위치 : 성동구 자동차시장3길 64번지 중랑물재생센터

공사내용 : 총인처리시설(412,000㎥/일)에 따른 통신공사 1식

공사기간 : 2017. 11. 27. ~ 2020. 1. 26.

도 급 비 : ***************************

도 급 자 : **************

감 리 자 : *********

Ⅲ
		실정보고 사항

변경사유

구분	변 경 내 용	비고
사 용 자 요청사항	************************************* ******************************************** *************************************	*** ***
	************************* ************************************************ ***************************	*** ***
	********************** *************************************	***
현장여건 변경사항	********************************* ***********************************************	*** ***
	******************************************	***
	********************************** *********************************************** ***************** *****************************	*** ***
공사기간 연 장	*************************************************************	*

검토내용

가. 도급비 수량 및 금액 변경사항                                      [단위 : 원]

품 명	규격	단위	당 초		변 경		증ㆍ감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
1.1.1 CCTV설비공사(정보통신단자함 및 기타부속설비공사)
강제전선관	아연도 28mm	m	***	*********	***	*********	****	**********
1종금속제가요전선관	28mm	m	*	*******	**	*******	**	******
전력케이블	F-CV 2C 4㎟	m	***	*******	***	*********	***	********
접지용전선	F-GV 4㎟	m	***	*******	***	*******	***	*******
광케이블	4core	m	***	*******	***	*******	***	********
박스커넥터	28mm	m	**	******	**	******	**	******
비닐전열케이블	VCTF 3C 1.5㎟	m	*	*	**	*******	***	********
UTP케이블	Cat.5e 4P	m	*	*	**	*******	***	********
풀박스	200×200×200	개	*	*	*	*******	**	********
소 계		식	*	*********	*	*********		*********

품 명	규격	단위	당 초		변 경		증ㆍ감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
1.2.1 CCTV설비공사(총인처리시설)
파상형경질 폴리에틸렌전선관	50mm	m	*****	*********	***	*********	****	**********
강제전선관	아연도 28mm	m	***	*********	***	*********	***	**********
1종금속제가요전선관	28mm	m	**	*******	**	*******	***	********
전력케이블	F-CV 2C 4㎟	m	***	*********	***	*********	****	**********
접지용전선	F-GV 4㎟	m	***	*********	***	*********	****	********
광케이블	4core	m	***	*********	*****	*********	******	**********
파상형경질 폴리에틸렌전선관	30mm	m	*	*	**	******	***	*******
터파기	기계8,인력2	㎥	*	*	**	******	***	*******
되메우기	토사	㎥	*	*	**	*******	***	********
경고테이프 포설	저압용	m	*	*	**	******	***	*******
박스커넥터	28mm	개	**	******	**	******	***	*******
비닐전열케이블	VCTF 3C 1.5㎟	m	*	*	***	*******	****	********
UTP케이블	Cat.5e 4P	m	*	*	***	*******	****	********
풀박스	200×200×200	개	*	*	**	*******	***	********
소 계		식	*	**********	*	**********		**********
1.2.2 방송설비공사(총인처리시설)
파상형경질 폴리에틸렌전선관	50mm	m	***	*********	***	*******	****	**********
제어용케이블	F-CVV-SB	m	***	**********	***	**********	****	**********
UTP케이블	Cat.5e 4P	m	*	*	***	*********	****	**********
합성수지전선관	CD 16mm	m	*	*	***	*********	****	**********
전관방송설비	기존설비 철거	식	*	*	*	*******	**	********
전관방송설비	재설치비	식	*	*	*	*********	**	**********
스피커라인체커	DLC-3224	개	*	*	*	*********	**	**********
리모트앰프	DRM-1000	개	*	*	*	*********	**	**********
배터리 케이스	DBC-1724	개	*	*	*	*******	**	********
베터리	DC24V/100AH	개	*	*	*	*******	**	********
스피커 셀렉터	DSS-1000	개	*	*	*	*********	**	**********
소 계		식	*	**********	*	**********		*********

품 명	규격	단위	당 초		변 경		증ㆍ감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
1.2.3 정보통신단자함 및 기타 부속설비공사(총인처리시설)
파상형경질 폴리에틸렌전선관	50mm	m	*****	*********	***	*********	******	**********
통신맨홀	통신수공1호	개소	**	*********	*	*********	**	**********
관로구방수	ø50	개소	**	*******	**	*******	***	********
터파기	기계8,인력2	㎥	***	*********	*	*	****	**********
되메우기	토사	㎥	***	*********	*	*	****	**********
경고테이프 포설	저압용	m	*****	*******	***	******	******	********
강제전선관	아연도 54mm	m	*	*	**	*********	***	**********
노말밴드	54mm	개	*	*	**	******	***	*******
소 계		식	*	**********	*	*********		***********
직 접 공 사 비								**********
간 접 공 사 비		식						**********
합 계								***********

※ 증가된 물량은 기존 계약단가 적용 / 신규비목에 대해 낙찰률 적용한 신규단가 적용

나. 관급비(전기관급 원방감시계측제어) 수량 및 금액 변경사항

품 명	규격	단위	당 초		변 경		증ㆍ감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
감시제어 시스템 설비
광케이블	멀티모드4CORE	개	*****	**********	*****	*********	******	**********
광점퍼코드	SC-SC	개	**	*********	***	*********	****	**********
PIGTAIL	SC-SC	개	**	*********	***	*********	****	**********
광케이블포설	멀티모드4CORE	m	*****	**********	*****	**********	******	**********
광케이블포설	싱글모드24CORE	m	*	*	*****	*********	******	**********
광케이블성단접속		코어	**	*********	*	*	***	**********
광케이블코어접속		코어	**	*********	***	*********	****	**********
접속 후 시험		코어	**	*********	*	*	***	**********
최종시험		코어	**	*********	***	*********	****	**********
공구손료		식	*	*******	*	*******	*	********
소계								**********
부가가치세								********
소 계								**********

다. 공사비 변경사항

1) 통신공사 도급비 변경                                                      [단위 : 원]

구 분	변경 전	변경 후	증ㆍ감액	비 고
총공사비	***********	***********	***********
도 급 비	***********	***********	***********
관 급 비	***********	***********	*
이 전 비	**********	**********	*

2) 전기공사 관급비 변경(원방제어감시장치)

*****************************************

라. 공사기간 연기

1) 연기사유 : 선행공정(토목) 공기연장에 따라 통신공사에 대한 준공기한 연기

2) 차수별 연기사항

구 분	변경 전	변경 후	증ㆍ감	비 고
총 차	***********************	***********************	*******
1 차	***********************	***********************
2 차	***********************	***********************

Ⅳ
		검토의견 및 조치계획

건설사업관리단 검토의견

〇 ****************************************************************************************************************************

〇 ***************************************************************************************************************************

〇 ***************************************************************************************

〇 **********************************************************************************************************************************

조치계획

〇 **************************************************************************

〇 ***************************************************************

***************************************************

*********************************************

*********************************   끝.