문서번호	시설과-71
결재일자	2020.1.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
신상현	조민형	박종수	01/08 최현실
협 조
	공원운영과장		배기선

보라매공원 운동시설 등

노후 시설물 정비사업 시행계획

2020. 1.

동부공원녹지사업소

(시     설     과)

보라매공원 운동시설 등 노후 시설물 정비사업 시행계획

보라매공원 내 노후된 운동시설(테니스장) 및 포장 등을 정비하여 시민들이 안전하고 쾌적하게 공원을 이용할 수 있도록 하고자 함

1		사 업 개 요

❍ 사 업 명 : 보라매공원 운동시설 등 노후 시설물 정비

❍ 위    치 : 보라매공원(동작구 여의대방로 20길 33)

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 6.

❍ 사업내용 : 노후 테니스코트(2면), 노후포장(3,000㎡) 정비 등

***************************************

************************************************************************************************

❍ 현황사진

노후 테니스 코트	노후 포장

2		추 진 계 획

❍ 설계용역

- 계약방법 : 일반수의계약

․근  거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목

․사  유 : 본 과업은 추정가격이 소액으로, 엔지니어링산업 진흥법 시행령 제3조에 의거 건설부문(조경)의 엔지니어링 활동주체 신고를 필하고 해당기술자를 보유한 전문업체와 계약

- 용역기간 : 착수일로부터 30일

❍ 공    사

- 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

․입찰참가자격 : 건설기술관리법에 의한 조경시설물 설치공사업으로 등록된 업체로 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체

- 공사기간 : 착공일로부터 60일

3		추 진 일 정

❍ ‘20. 1.       : 기술용역타당성 심사, 설계용역 발주

❍ ‘20. 2. ~ 3. : 설계용역 계약 및 시행

❍ ‘20. 3.       : 자체 설계심사 및 공사발주

❍ ‘20. 4. ~ 6. : 공사시행 및 준공

4		행 정 사 항

❍ 기술용역타당성 심사 의뢰(→市 기술심사담당관)

❍ 예산 수시재배정 요구(→사업소 공원운영과)

❍ 자체 설계심사(사업소 시설과)

❍ 공사발주 의뢰(→市 재무과). 끝.