투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	북부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	교통안전시설물(교통신호기) 원인자 부담공사 준공기한 연기요청

1. 북부도로사업소 기전과-3358(2019.10.10.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진하고 있는 「창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사」와 관련한       교통안전시설물(교통신호기) 원인자 부담공사에 대하여 아래와 같은 사유로 준공기한     연기를 요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통산전시설물(신호)원인자부담공사

(창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사)

나. 공사기간 : 2019.10.10 ~ 2020.01.10.

다. 원 인 자 : 서울특별시 도시기반시설본부

라. 공사참여자

- 감리 : ㈜트래픽스 , 대표 김희수

- 시공 : ㈜유니시스엔지니어링, 대표 문장호

마. 준공기한 연기요청

공사명	당초	변경	연기사유
교통시설물(신호)원인자부담공사	2020.01.10.	2020.08.31	주공정(토목) 준공기한 연기에따른 후속공정인 전기공사 준공연기

붙임 : 감리실정보고(준공기한연기 검토의견서) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	마동훈		녹색성장과장	오삼록		설비부장	01/09 임정규
협조자
시행	설비부-369	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8636	/전송	02-3708-8659	/	mdh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)