투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	하도급 계약 변경 알림(강남순환 4공구)

1. 서영강남 19-329(2019. 12. 27.) 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행 중인『강남순환도시고속도로 4공구 건설공사』관련하여 하도급 계약 변경 통보되어 아래와 같이 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 하도급 계약 변경 현황

하도급사	공 종	공 사 비				공사기간
		구분	원도급액	하도급액	비율 (%)
******* *******	기계설비공사	당초	231,880,000	202,400,000	87.29	2019. 7. 8.~ 2019. 11. 30.
		변경	231,880,000	202,400,000	87.29	2019. 7. 8.~ 2020. 1. 31.
****** *******	외장재 설치공사	당초	1,087,900,000	920,700,000	84.63	2016. 3. 18.~ 2019. 11. 30.
		변경	1,087,900,000	920,700,000	84.63	2016. 3. 18.~ 2020. 1. 31.
******* ******	방수공사	당초	2,124,100,000	1,793,000,000	84.41	2016. 4. 25.~ 2019. 11. 30.
		변경	2,169,200,000	1,849,100,000	85.24	2016. 4. 25.~ 2020. 1. 31.
******* *******	조경공사	당초	707,960,000	584,650,000	82.58	2016. 4. 22.~ 2019. 11. 30.
		변경	851,730,000	702,900,000	82.53	2016. 4. 22.~ 2020. 5. 31.
******* ******	방음벽공사	당초	2,657,600,000	2,109,800,000	79.39	2016. 3. 30.~ 2019. 11. 30.
		변경	2,550,900,000	2,109,800,000	82.71	2016. 3. 30.~ 2020. 5. 31.
******* ******	신축이음 설치공사	당초	776,600,000	672,100,000	86.54	2016. 4. 5.~ 2019. 11. 30.
		변경	776,600,000	672,100,000	86.54	2016. 4. 5.~ 2020. 1. 31.

붙임  하도급 변경계약 통보서 6부.  끝.

	토목부장
주무관	김구		도시고속도로과장	장수철		토목부장	01/09 김용제
협조자
시행	토목부-662	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8664	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	부분공개(6)