문서번호	설비부-405
결재일자	2020.1.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
추한영		김오열	01/10 임정규
협조

『시립동대문실버케어센터 건립 기계공사』

준공기한 연기 검토 보고

2020. 01.

도시기반시설본부

설 비 부

『시립동대문실버케어센터 건립 기계공사』

준공기한 연기 검토 보고

선행공정(건축) 지연에 따라 기계공사(1차수)의 준공기한을 아래와 같이 연장하고자 보고 드림.

- 준공예정일 : **************************************

□  공사개요

○  규    모 : 지하1층/지상4층 2,990㎡

냉난방설비, 급수급탕, 지열에너지, 오배수배관 등

○  공사기간 : 2019.10.25. ∼ 2021.3.24.

○  공 사 비 : 510백만원

○  시 공 사 : 경문이엔지(주)

□  관련근거

○ 공기연장요청(책임건설사업관리기술자, `20.1.7.)

□  변경내용

○ 변경사유 : **********************

○ 계약변경 현황 - 계약금액 변경 없음

구 분	당 초	******	***
총 차	`19.10.25.〜`21.03.24.	`19.10.25.〜`21.03.24.	변경없음
1 차	`19.10.25.〜`19.12.31.	****************************	******

- 귀책사유 : 도시기반시설본부

○ 건설사업관리기술자 검토의견

- 1차수 공기연기 내용을 검토한 결과 적정하다고 사료됨

□  보고자 의견

○ 건설사업관리기술자 검토의견이적정한 것으로 판단되어 총무부로 계약기간 연장을 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 계약기간 변경 요청 문서 각 1부. 끝.