＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	********************
(경유)	************
제목	준공지연에 따른 공정관리철저 및 자료제출(독촉)-5차 안내

1. 우리사업소와 계약하여 공사중인 「서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」관련, 준공지연에 따른 협조사항을 아래와 같이 안내하오니 적극 임하여 주시기 바랍니다.

가. 공정관리 철저

- 현제 잔여공정인 낙석방지망설치 및 현장정리에 대한 공정관리 철저

나. 준공전 설계변경 심사를 위한 자료 제출

- 단가산출 근거자료(기안내한 공문 참조)

끝.

	서부수도사업소장
★주무관	방만천		행정관리팀장	엄태현		행정지원과장	01/13 박달경
협조자
시행	행정지원과-897	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)