문서번호	설비부-551
결재일자	2020.1.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	01/14 임정규
협 조

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 -

설계변경 검토보고(총차4회, 2차3회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 -

설계변경 검토보고(총차4회, 2차3회)

『중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사』관련 총인처리시설 인입 케이블 설치 방법 변경(도로구간 지중매설 → 공동구) 등에 대하여 건설사업관리단으로부터 설계변경 서류가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

***************************************************

*********************************

*************************

************************************

************************

****************************

*******************************

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사

공사위치 : 성동구 자동차시장3길 64번지 중랑물재생센터

공사내용 : 총인처리시설(412,000㎥/일)에 따른 전기공사 1식

공사기간 : 총차 ‘17. 11. 24. ~ ‘20. 7. 31.(2차 ‘18. 12. 11. ~ ‘20. 7. 31.)

도 급 비 : ************************************

도 급 자 : ***************

감 리 자 : *********

Ⅲ
		설계변경 사항

설계변경 내용

〇 변경사유

- 환수 가압펌프 동력케이블 규격 변경

- 총인처리시설 인입 케이블 설치방법 변경(도로구간 지중매설 → 공동구)

- 탈수케익 이송 컨베이어 변경에 따른 전기분야 변경사항 반영

〇 변경금액

- ****************************************************

계약심사 결과

〇 심사결과

구 분	심사 요청금액(A)	심사금액(B)	절감액(C=A-B)	절감률
설계변경	*********	*********	*******	****

〇 조정 사유

- 자재단가 조정 : 케이블트레이 외 3종(조달청 단가)

- 일위대가 조정 : 케이블 덕트 설치 외 4개 공종

변경 세부항목

품 명	단위	당초		변 경		증·감액	변경사유
		규 격	수량	규 격	수량
1. 전력간선공사(비총인예비간선)
강제전선관-노출	M	****	**	****	***	***********	케이블 규격변경 공동구 활용 케이블 설치
강제전선관-노출	M	****	**	****	**	***********
강제전선관-노출	M	*****	**	*****	*	***********
파상형경질폴리 에틸렌 전선관	M	****	***	****	***	***********
동심 중성선 케이블 FR-CN/CO-W	M	******	*****	******	*****	********
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV)	M	*******	*	*******	*****	*************
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV)	M	*******	*****	*******	*****	************
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV)	M	*******	*****	*******	*	*************

품 명	단위	당초		변 경		증·감액	변경사유
		규격	수량	규격	수량
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV)	M	***	*	***	**	*********	케이블 규격변경 공동구 활용 케이블 설치
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV)	M	***	**	***	**	*********
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV)	M	****	**	****	*	*********
압착단자	EA	******	**	******	***	*********
압착단자	EA	******	**	******	*	*********
압착단자	EA	*******	**	*******	**	***********
압착단자	EA	*******	**	*******	**	***********
압착단자	EA	*******	**	*******	*	***********
맨홀	개소	*****************	**	*****************	**	***********
관로구방수	개소	****	**	****	**	*********
동력 케이블 트레이 지지가대	개소	***	**	***	**	***********
동력 케이블 트레이 지지가대	개소	***	**	***	**	*********
동력 케이블 트레이 지지가대	개소	****	**	****	*	*********
터파기	㎥	***** *******	***	***** *******	**	*********
되메우고 다지기	㎥	*******	***	*******	**	***********
경고테이프 포설	M	****	***	****	**	*********
보안등기구	EA	*******	*	*******	*	***********
보안등 기초 설치	개소	***********	*	***********	*	*********
소 계						************
2. 케이블트레이, 계측, 전기소방(총인처리시설_공동구설치 활용변경)
케이블 트레이	M	*********	*	*********	***	************	공동구 활용 케이블 설치 (공동구 트레이)
케이블 트레이 HOR. ELBOW	EA	*********	*	*********	*	*********
케이블 트레이 Ver. Elbow	EA	*********	*	*********	*	*********
앙카볼트 설치	EA	*******************	*	*******************	***	***********
케이블 DUCT	M	*********	*	*********	**	***********
케이블DUCT Cover	M	****	*	****	**	*********
케이블DUCT VER Elbow (IN)	EA	****	*	****	*	*********
케이블DUCT VER Elbow(OUT)	EA	****	*	****	*	*********
케이블DUCT VER Elbow Cover	EA	****	*	****	*	********
케이블DUCT HOR Elbow	EA	****	*	****	**	*********
케이블DUCT HOR Elbow Cover	EA	****	*	****	**	*********

품 명	단위	당초		변 경		증·감액	변경사유
		규격	수량	규격	수량
ROD COUPLING	EA	****	*	****	***	*********	공동구 활용 케이블 설치 (공동구 트레이)
R/F BRACKET (레이포싱브라켓)	EA	**********	*	**********	***	***********
HANGER(천정형)	EA	***************	*	***************	***	*********
ROD-SUS	EA	********	*	********	**	*********
HOLD DOWN CLAMP	EA	*****	*	*****	***	*********
SPRING B/N-SUS	SET	********	*	********	***	*********
JOINT CONNECTOR	EA	*****	*	*****	***	*********
COVER CLAMP	EA	*	*	*	**	********
샹크,너트	EA	****	*	****	***	********
라이져	EA	*******	*	*******	**	********
핸드홀	개소	****	*	****	*	***********
파상형경질 폴리에틸렌 전선관	M	***	*****	***	***	************
파상형경질 폴리에틸렌 전선관	M	***	***	***	**	***********
소 계						************
3. 동력설비 및 계측제어설비공사(탈수기동_탈수케익 이송컨베이어 공급전원)
강제전선관-노출	M	****	*	****	*	*********	탈수기동 탈수케익 이송컨베이어 공급전원 반영
강제전선관-노출	M	****	*	****	*	*********
1종금속제가요전선관-노출	M	*****	*	*****	*	********
1종금속제가요전선관-노출	M	*****	*	*****	*	********
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV)	M	*****	*	*****	***	*********
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV)	M	*****	*	*****	***	***********
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV)	M	******	*	******	***	***********
0.6/1kV절연난연제어용케이블(F-CVV)	M	********	*	********	***	***********
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV)	M	**********	*	**********	**	********
동력 케이블 트레이 지지가대	개소	***	*	***	*	*********
1종금속제가요전선관 박스커넥터	EA	*******	*	*******	*	*******
1종금속제가요전선관 박스커넥터	EA	*******	*	*******	*	*******
네트워크케이블	M	******	*	******	**	*********
소 계						***********
누 계						************
제 경 비						************
공 급 가 액						************
부 가 가 치 세						***********
합 계						************

공사금액 변경내용

〇 차수별 공사금액 변경                                          [단위 : 원]

구 분	변경 전	변경 후	증ㆍ감액	비고
총차	*************	*************	************
2차	*************	*************	************

〇 세부내역(총차)                                                [단위 : 원]

구 분		변경 전	변경 후	증ㆍ감액	비고
직접공사비	재료비	***********	***********	************
	노무비	*************	*************	************
	경 비	***********	***********	***********
	소 계	*************	*************	************
제 경 비		***********	***********	***********
공급가액		*************	*************	************
부가가치세		***********	***********	***********
합 계		*************	*************	************

〇 세부내역(2차)                                                [단위 : 원]

구 분		변경 전	변경 후	증ㆍ감액	비고
직접공사비	재료비	***********	***********	************
	노무비	*************	*************	************
	경 비	***********	***********	***********
	소 계	*************	*************	************
제 경 비		***********	***********	***********
공급가액		*************	*************	************
부가가치세		***********	***********	***********
합 계		*************	*************	************

Ⅳ
		검 토 의 견

건설사업관리단 검토의견

〇 위 검토내용과 같이 서울특별시 계약심사 결과 및 시공사 설계변경 도서를 검토한 결과 발주처 지시사항에 적합하게 작성되었으므로 시공사에서 제출한 설계변경서는 적정함

조치계획

〇 전기공사 변경에 대한 건설사업관리단 검토결과 적정하다고 보고되었으며 동 건에 대한 설계변경 계약심사 결과 조정금액을 감액 반영하였음을 확인함

〇 동 공사 건에 대하여 총무부에 설계변경 계약 의뢰하고자 함

**********************************************

*****************************************

*********************

***************************

************************************