문서번호	설비부-576
결재일자	2020.1.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
김도형		여인웅	01/14 임정규
협조
	주무관		배문정

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사』

공사타절에 따른 준공 검사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  01.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사』

공사타절에 따른 준공검사 보고

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사』도급계약자(영풍진흥기업주식회사)가 공사포기함에 따라 기시행 완료한 공사를 타절 준공하고자 함

공사개요

□ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(2차)

□ 위    치 : 서울 성동구 자동차시장3길 64(중랑물재생센터 내)

□ 공사규모 : 하수처리시설 Q=828,000㎥/일

- 총인 412,000㎥/일(TP 0.13㎎/L)+ 비총인 416,000㎥/일(TP 0.18㎎/L) ⇒ 혼합방류(TP 0.46㎎/L)

□ 공사기간 : 2017.11.20.~2020.6.30.(2차 2018.10.10.～2020.6.30)

□ 공사금액 : 2,478백만원(2차 1,703백만원)

□ 도 급 자 : ㈜영풍진흥기업

□ 감 리 사 : ㈜천일, 동부엔지니어링(주), ㈜범창종합기술

추진 현황

□ 2017.11.20. : 공사계약 및 1차공사 착공

□ 2018.09.30. : 1차공사 준공(759,111천원)

□ 2018.10.10. : 2차공사 착공

□ 2019.12.31. : 도급계약자 1차부도

□ 2020.01.02. : 공사중단(공사포기각서 제출)

□ 2020.01.03. : 도급계약자 최종 부도

□ 2020.01.08. : 보증시공업체 선정 통보(기계설비건설공제조합)

□ 2020.01.09. : 도급계약자 부도에 따른 조치 계획 보고(본부장 방침)

□ 2020.01.09. : 타절 준공검사 시행

관련근거

□ 준공검사(타절) 결과 보고(중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사)

□ 천일(감리)제20-38호(2020.01.10.)

기성부분 검사 내용

□ 타절 준공일자 : 2019. 12. 31

□ 타절 준공검사 : 2020. 01. 09

□ 타절 준공금액

구분	계약금액(원)	타절 준공금액(원)			잔여금액	비고
		전회	금회	누계
총차	2,478,193,000	1,132,873,000	38,412,000	1,171,285,000	1,291,021,000
1차	775,000,000	759,113,000	-	759,113,000	준공정산 (15,887,000)	기 준공 (18.9.30)
2차	1,703,193,000	373,760,000	38,412,000	412,172,000	1,291,021,000

□ 준공 검사자

- 기계분야 기술지원기술자 김상배, 소방분야 기술지원기술자 이종수

□ 준공 검사 입회자

- 책임건설사업관리기술자, 도급계약사 현장대리인, 채권자, 보증기관

□ 준공 검사결과

- 검사원으로 임명받아 검사한 결과 전 공사에 대하여 공사설계도서, 품질    관리기준, 및 기타 약정대로 24.20% 준공(타절) 햐였음을 인정함

□ 하자이행보증

- 도급계약자 부도로 인하여 이행증권 발급 어려움

- 지방계약법 시행규칙 제70조(하자보수보증금률)에 의한 해당금액을 현금 예치

※ 고지서 발급받아 세입세출외현금으로 하자보증기간(2년) 동안 관리

타절 준공금액 지급

□ “중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(2차)” 계약 건에 대한 채권압류 및 전부명령

□ 관련근거 : 서울서부지방법원2019타채6442

- 채권자: 대원엠이씨 주식회사

- 채무자: 영풍진흥기업 주식회사

- 제3채무자: 서울특별시

□ “제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 안된다”는 주문내용에 따라 하자보증금을 제외한 댓가를 채무자(대원엠이씨 주식회사)에 지급

□ 지급 상세 내역                                                (단위: 원)

구분	타절 준공금액(원)			하자보증금 (D=C×3%)	실 지급액 (E=B-D)	비고
	전회(A)	금회(B)	누계(C=A+B)
총차	1,132,873,000	38,412,000	1,171,285,000	35,138.550	3,273,450

조치계획

□ 건설사업관리단에서 실시한 타절 준공검사의 결과가 적절함에 따라 기 시공 완료된 부분에 대하여 타절 준공처리하고자 함

붙임 1) 타절준공검사 결과 보고(감리단) 1부.

2) 준공내역서(총차, 2차) 1부.  끝.