문서번호	시설보수과-193
결재일자	2020.1.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		박병연	01/08 박문희
협조
	주무관		이승훈

목동교 보수공사 실시설계용역 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 1

강서도로사업소

[시설보수과]

목동교 보수공사 실시설계용역 추진계획

『2019년 목동교 정밀안전진단 용역』 결과에 의거 목동교 보수공사를 위한 실시설계용역을 추진코자 함.

▣ 사 업 개 요

□ 사 업 명 : 목동교 보수공사

□ 사업기간 : 2020. 1 ~ 2020. 12

□ 예 산 액 : 1,108백만원

□ 공사내용 : 목동교(구교) 강선보강 21개소, 목동교(신교) 받침교체 121개소,  신축이음 교체 50M 등

▣ 목동교 현황

시설물명	규 모	준공년도	종구분/등급	구 조	비 고
목동교(구교)	L=240m,B=20.4m	1968	2종/C등급	PSCI	DB24 (램프 DB18)
목동교(신교)	L=240m,B=25.6m	1986		ST-BOX	DB24

▣ 추진경위

□ 2019. 3. 25 : 목동교 정밀안전진단용역 착수

□ 2019. 7. 11 : 용역수행시 거더처짐 및 균열발생에 따른 보강 필요

▸ 목동교 보수공사 예산요청 : 교량안전과 1,108백만원

□ 2019.10. 16 : 용역 최종보고 및 자문회의 시행

▸ 자문결과 목동교 거더처짐 및 균열부에 대한 지속점검 및 목동교(구교,신교) 보강공사 필요

□ 2019.12.  9 : 목동교 정밀안전진단 건설기술심의 개최(기술심사담당관)

▸ 조속한 시일내 목동교 거더구간 강선보강 등 조치 필요(C 등급)

▸ 진단용역 시행중 목동교 보강관련 설계용역 등 병행하여 추진요망

▸ 제211차 개최결과 통보 : 기술심사담당관-22640호(‘19.12.12)

▣ 실시설계용역 시행방안

□ 실시설계비(용역 타당성 심사 전) : 약 47,500천원

- 개략 공사비 : 약 806백만원(기타비용 제외),  실시설계비 요율 : 6.16% 적용

□ 용역기간 : 착수일부터 90일

□ 실시설계 내용 : 목동교 보수•보강 공사를 위한 실시설계

- 현장조사 및 자료수집, 검토분석 등

- 목동교 구교 관련 문제점 검토후 대안공법 및 자재검토 수행

- 목동교 신교 관련 문제점 검토후 대안공법 및 자재검토 수행

- 목동교 구교의 거더보강 관련 구조검토 및 설계

- 목동교 신교의 교량받침교체 관련 내진성능평가 및 설계

- 기타 과업내용서의 관련자료 검토 및 적용 등

□ 입찰방법 : 전자공개수의계약

□ 입찰참가자격

- 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

- 엔지니어링산업진흥법 제21조 등에 의거 건설부문 엔지니어링사업(구조, 토질•지질)의 신고를 필한자,

또는 기술사법령에 의거 건설부문 엔지니어링사업(구조, 토질•지질)분야의 기술사 사무소 개설 등록을 필한자

▣ 예산현황 및 조치방안

□ 목동교는 거더 보강공사를 조속히 시행하여야 하는 시설물이나, 교량안전과에서 2020년도 기금으로 배정예정에 있어 실시설계 용역발주시 향후 2개월 이상의 기간이 소요됨(기금배정 2020. 2 중순 예정)

⇒ 현재 공사시행 관련 목동교 보수공사 실시설계용역 발주 예산이 없음

□ 설계용역 시행시 약 3개월의 기간이 소요되므로 보강공사를 위한 조속한 용역발주 등 조치가 필요함

※ 예산확보 방안

▸ 목동교 교량의 안전확보를 위해 교량안전과에서 일반교량의 안전관리에 배정되는 “교량 일상유지보수공사” 예산을 활용하여 실시설계용역 발주하고자 함.

⇒ 신속한 공사시행으로 시설물 안전확보

▸ 예산과목 : (교량안전과)교량관리, 일반교량, 교량시설물일상유지, 시설비

▣ 향 후 계 획

□ 2020.  1월 : 용역 타당성 심사

□ 2020.  1월 : 용역발주 및 계약

□ 2020.  4월 : 실시설계용역 준공

□ 2020.  4월 : 목동교 보수공사 발주(기금)

붙임  1. 실시설계용역 내역서 1부.

2. 목동교 보수공사 실시설계용역 과업내용서 1부.  끝.