문서번호	정수시설과-597
결재일자	2020.1.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		양영민	01/15 이철범
협 조
	주무관			김재성

「오존접촉조 배오존가스 처리배관 신설공사」 계약기간 연장 검토보고

2020. 1.

암사아리수정수센터

「오존접촉조 배오존가스 처리배관 신설공사」

계약기간 연장 검토보고

최근 원수의 맛냄새물질 증가에 따라 오존발생기 가동중단이 어려운 실정으로 맛냄새물질 유입이 감소하는 5월경으로 공사시기를 조정하고자 계약기간을 연장하고자 함

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 오존접촉조 배오존가스 처리배관 신설공사

❍ 계약금액 : ************

❍ 계약기간 : ’20.1.16. ~ ’20.2.9.

❍ 사업내용 : 오존접촉조 혼화지(1~4지) 배오존가스 처리배관 신설

❍ 계약업체 : ***************

□ 계약변경 내용 및 사유

❍ 변경사항

계약금액	당 초	************
	변 경	************
	증·감액	변경없음
계약기간	당 초	’20.1.16. ~ ’20.2.9.
	변 경	’20.1.16. ~ ’20.5.31.

※ 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책소재 : 서울시 암사아리수정수센터)

❍ 변경사유

- 오존가스의 농축에 따른 작업자 중독을 예방하고, 화재위험이 수반되는 작업 전에는 농축가스(O2, O3)로 인한 화재예방을 위하여, 오존발생기 가동정지 및 배오존파괴기 가동으로 작업 전 반드시 퍼지가 필요하나,

- 최근 맛냄새물질 증가로 인하여 오존발생기 가동중지 불가

⇨ 맛냄새물질이 감소하는 5월경으로 공사일정 조정

□ 향후계획

❍ 계약변경(기간연장) 계약부서 의뢰(행정관리과)               : ’20.1.15.

❍ 공사완료 및 준공                                           : ’20.5.31.

붙임 : 합의서 1부.  끝.