투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	코끼리 보정장치[ERD] 설치 공사 설계변경 및 준공기한 연기의뢰

예산과목 : 서울대공원 동물복지2과, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 동물사 유지관리, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 서울대공원 총무과)

1. 시설과-403호(2020.1.16) 관련입니다.

2. 코끼리 보정장치[ERD] 설치 공사에 대하여 설계변경을 아래와 같이 변경계약 및

준공기한을 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 코끼리 보정장치[ERD] 설치 공사

나. 계약금액 : ************************

다. 공사기간 : 2019.10.24.∼ 2020.1.16.

라. 계 약 자 : ****************

마. 공사기간 연장

****	****	*****
************************	***********************	******

1) 변경사유 : 설계변경에 따른 공사기간 연장

2) 귀책사유 : 서울대공원

붙임  1. 코끼리 보정장치 설치 공사 실정보고서 검토보고(방침서) 1부.

2. 정산 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.

							동물복지2과장
주무관							김규현			동물복지2과장					01/16 송부용
협조자				주무관						고슬기
시행			동물복지2과-280									(						)		접수											(						)
우	13829					경기 과천시 대공원광장로 102, 서울대공원(막계동)															/
전화		02-500-7651						/전송			02-500-7659					/	kgh1981@seoul.go.kr												/	부분공개(5)