문서번호	급수설비과-572
결재일자	2020.1.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
홍원기	유동수	이규상		01/16 구아미
협 조

시민이 즐겨 마시는 건강하고 맛있는 물 세계속의 아리수

2020년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획 보고

2020.  1.

급수부

급수설비과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

’20년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획

보온재 및 뚜껑이 파손, 망실되어 동파의 우려가 있는 수도계량기 보호통을 일괄 정비하여 시민 불편을 최소화하고자 함

Ⅰ		사 업 현 황

□ 설치근거

❍ 행정2부시장 방침 제77호 (2013. 03.13) “ 겨울철 대비 동파·동결 예방대책 추진”

❍ 차장방침 제137호(2007.3.29.) “시민 불편해소를 위한 보호통 뚜껑 및 보온재 제공”

□ 사업개요

❍ 수도계량기보호통 전수조사 : ’13. 3. ~ 5월 ❍ 총사업기간 : 2013 ~ ❍ 보온재 및 뚜껑 정비대상: 160천개 ❍ 총사업비 : 54억원 ※ 20년 4억원 : 보온재 2억, 뚜껑 2억		개
		선

Ⅱ		보온재 정비

□ 연도별 추진 계획

❍ 추진기간 : 2013 ~

❍ 정비대상 : 139,127개

❍ 사 업 비 : 44억원

❍ 연도별 추진실적 및 계획

구 분	계	~ 2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
정비대상(개)	139,127	108,128	15,940	6,246	3,123	5,690
소요예산(억원)	44억원	34	5	2	1	2

□ 2019년 추진 실적

❍ 목표량 : 3,123개

❍ 사업비 : 1억

❍ 실  적 : 5,549개 (177.7%)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표	3,123	450	375	449	375	375	449	325	325
설치실적	5,549	1,516	427	597	368	396	1,049	871	325
비율(%)	177.7	336.9	113.9	133.0	98.1	105.6	233.6	268.0	100.0

□ 2020년 세부추진 계획

❍ 추진기간 : 2020. 1. ~ 11월

❍ 목 표 량 : 5,690개

❍ 사 업 비 : 2억원

❍ 사업소별 추진계획

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
설치 (개)	계	5,690	799	756	797	706	754	798	540	540
	15㎜	3,000	425	425	425	375	425	425	250	250
	20㎜	1,550	212	192	210	192	190	210	172	172
	25㎜	450	63	55	63	55	55	63	48	48
	30㎜	30	48	40	48	40	40	48	33	33
	40㎜	310	42	38	42	38	38	42	35	35
	50㎜	50	9	6	9	6	6	10	2	2
예산(백만원)		200	27	26	27	24	25	27	22	22

- 2013년 보온재 전수 결과 정비계획 물량은 2017년까지 124천개 완료하였으나,

- 전수 조사 이후에 추가로 발생한 보온재 파손, 망실 및 당초 정비 대상 중 누락되어 정비가 필요한 보온재 등 정비 등을 위해 예산수립

Ⅲ		보호통 뚜껑 정비

□ 연도별 추진 계획

❍ 추진기간 : 2016 ~

❍ 정비대상 : 30,372개

❍ 총사업비 : 14억원

❍ 연도별 추진계획

	계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
정비대상 (개)	30,372	6,618	6,618	6,618	6,618	3,900
소요예산(억원)	14	3	3	3	3	2

□ 2019년 추진 실적

❍ 목표량 : 6,618개

❍ 사업비 : 3억원

❍ 실   적 : 6,561개 (99.1%)

(단위 : 개)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표	6,618	912	794	918	794	796	912	746	746
설치실적	6,561	916	799	747	747	801	922	833	796
비율(%)	99.1	100.4	100.6	81.4	94.1	100.6	101.1	111.7	106.7

□ 2020년 세부추진 계획

❍ 추진기간 : 2020. 1. ~ 11월

❍ 목표량 : 3,900개

❍ 사업비 : 2억원

❍ 사업소별 추진계획

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
설치 (개)	계	3,900	553	553	534	486	546	546	341	341
	15㎜	3,300	460	460	450	420	455	455	300	300
	20㎜	300	45	45	40	30	45	45	25	25
	25㎜	100	16	16	14	12	15	15	6	6
	30㎜	100	16	16	14	12	15	15	6	6
	40㎜	50	8	8	8	6	8	8	2	2
	50㎜	50	8	8	8	6	8	8	2	2
배정예산 (백만원)	자재비	130	18.5	18.5	17.8	16.2	18.2	18.2	11.3	11.3
	설치비	70	10	10	9.5	8.7	9.8	9.8	6.1	6.1

Ⅳ		조치 계획

❍ 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비대상 중 동파 우려가 많은 15㎜ 및 20㎜ 위주로 정비

- 최근 5년간 동파된 보호통의 보온재 및 뚜껑을 우선 정비(계측관리과 자료)

- ‘20년 3월 : 금년 동파계량기 조사 현황 자료(3월말 목록 배포)

※ 정비 대상에 없더라도 파손 또는 망실 및 응달에 보호통이 위치해 동파 우려가 있는 보온재 및 뚜껑은 집중 정비

Ⅴ		행 정 사 항

□ 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 교체 시행

❍ 보온재 및 뚜껑 교체관련 예산(4억)을 수도사업소에 일괄 재 배정

❍ 사업소 실정에 맞게 정비 계획 및 자재구매 방법 등을 수립 실시

❍ 사업소와 계약된 급수공사 업체에 작업지시 후 정산시행

❍ 동절기 이전 정비 완료하여 동결․동파 예방 : 11월까지 완료

❍ 매월 5일 보온재 및 뚜껑 정비 실적을 급수운영과에서 수합 보고

붙임 : 최근 5년간 동파 수용가 내역 1부.  끝.