＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(까치산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역)

1. 우리 본부에서 추진 중인 아래 용역에 대하여 준공기한 연기 의뢰하오니 조치

하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 까치산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역

나. 용역업체 : ㈜삼안 대표 최동식

다. 계약금액 : 318,780,000원

라. 계약일자 : 2019.5.23.

마. 준공기한 연기 : 당초 2019.5.23. ~ 2020.1.22.

변경 2019.5.23. ~ 2020.7.15.

바. 귀책소재 : 상수도사업본부

사. 지체상금 부과 여부 : 미부과

아. 연기사유 : 배수지 건설 예정부지 토지소유자와의 굴착허가 협의가 늦어져 지반조사용역결과 성과품 납품(’19.11.30.) 지연에 따라 실시설계 등 향후 일정의 순차적 지연으로 인한 용역수행 절대기간 부족

붙임 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	계획설계과장
주무관	조규환		계획설계과장	01/16 송헌영
협조자
시행	계획설계과-584	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1417	/전송	02-3146-1429	/		/	부분공개(5)