문서번호	시설보수과-114
결재일자	2020.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
김승조		조선행	01/16 한성현
협 조

「2019년 불광천/홍제천 차집관거 보수공사(사각)」

맨홀확경 2개소에 대한 실정보고 검토

2020. 01.

시설보수과

「2019년 불광천/홍제천 차집관거 보수공사(사각)」

맨홀확경 2개소에 대한 실정보고 검토

『2019년 불광천/홍제천 차집관거 보수공사(사각)』시공중 준설토 장비의 원활한 진입을 위한 책임감리원 실정보고 건의 검토결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 서울시설공단 공사감독2처–404(2020.01.15.)호 실정보고와 관련임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 불광천/홍제천 차집관거 보수공사(사각)

○ 규 모 : 차집관로 단면보수 1,623m(불광천 833m, 홍제천 790m)

○ 공사비 : 3,403,365천원

○ 도급자 : 금강에이스건설(주) 노정범

○ 감리자 : 금강에이스건설(주)

□ 추진경위

○ 2020.01.15. : 맨홀확경에 대한 실정보고 제출(서울시설공단 → 난지물재생센터)

□ 실정보고 주요내용

○ 맨홀 확경 2개소 신설

○ 변경사유

- 기존 차집관거 장비 투입구가 없어 맨홀확경하여 차집관거내 준설 토록 함

○ 감리단 검토의견

- 준설 장비 진입을 위하여 필요한 조치 인건으로 판단됨.

- 실정보고의 공사비 증감은  전체공사 준공전 증감되는 금액을 합산하여 계약금액 증액없이 정산하는 것이 타당함.

□ 검토자 의견

○ 금회 확경된 맨홀을 향후 준설장비 진입 및 유지관리에 활용할수 있으며, 현재 예산이월하여 사업 추진중인 2019년 불광천/홍제천 차집관거 보수공사(사각)의 준설을 위한 장비진입을 위하여 맨홀 확경이 적정한 조치라고 판단됨

□ 조치계획

○ 준설장비 진입을 위한 맨홀확경 실정보고 건은 적정한 것으로 판단되는  바, 실정보고 승인 통보코자 하오며, 향후 설계 변경시 계약금액 증액없이 증감 금액을 합산하여 정산하여 반영토록 추진코자 합니다.

붙임 : 관련공문 1부.  “끝”.