문서번호	계획설계과-572
결재일자	2020.1.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
조규환	송헌영	이규상		01/16 구아미
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

『까치산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역』 준공기한 연기 보고

2020. 1.

상수도사업본부

(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	중간보고 (’19.12.20.)
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『까치산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역』

준공기한 연기 보고

「까치산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역」수행 중 준공기한 연기 사유가 발생하여 보고 드림

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 까치산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역

❍ 사업위치 : ******************

❍ 사업개요 : V=5,000㎥, 송배수관 부설 D 400~500㎜, L=2.9㎞

❍ 용역기간 : 2019. 05. 28. ~ 2020. 01. 22.

❍ 계약금액 : 318,780천원

❍ 용 역 사 : ㈜ 삼 안, ㈜ 유 신

Ⅱ		준공기한 연기

❍ 준공기한 연기사유

- 배수지 건설 예정부지 토지소유자와의 굴착허가 협의가 늦어져 지반조사용역결과 성과품 납품(’19.11.30.) 지연에 따라 실시설계 등 향후 일정의 순차적 지연으로 인한 용역수행 절대기간 부족

❍ 준공기한 연기 : 당초 2019.5.28. ~ 2020.1.22.

변경 2019.5.28. ~ 2020.7.15.

※ 향후 일정

- 2019년 12월 ~ 2020년 3월 : 실시설계 수행

- 2020년 2월 : 도시계획시설결정 및 근린공원기본계획변경 승인 요청

- 2020년 3월 ~ 4월 : 설계경제성(VE) 심사(본청 기술심사담당관)

- 2020년 5월 ~ 6월 : 설계경제성(VE) 심사결과 반영, 실시설계 완료

- 2020년 6월 : 도시계획시설결정, 근린공원기본계획변경 승인 완료

- 2020년 6월 ~ 7월 : 보고서 및 성과품 작성

❍ 귀책사유 : 상수도사업본부

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

Ⅲ		조치계획

❍ 본부 재무회계과에 준공기한 변경계약 요청.  끝.