투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사 총차,1차,2차-1회)

1. 설비부-689(2020.01.15.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인「중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사

나. 계 약 자 : 주식회사 순성이엔씨 대표자 양재희

다. 계약변경 내용                                                     [단위 : 원]

구 분	당 초			변 경
	총차	1차	2차	총차	1차	2차
계약금액	***********	*********	***********	*********** *************	********** ************	*********** ************
공사기간	**********	**********	**********	**********	**********	**********

라. 변경사유 : 사용자 요청사항 반영에 따른 금액변경 및 선행공정 지연에 따른 공기연장

붙임   1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차,1차,2차) 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	이창근		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	01/16 임정규
협조자
시행	설비부-712	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-2660	/	zoom4799@seoul.go.kr	/	부분공개(5)