문서번호	토목부-1304
결재일자	2020.1.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김동수		최진우	01/17 김용제
협조

- 개봉철도고가 성능개선 공사 -

실정보고 검토 보고

(철도보호지구 내 EGI휀스 설치 및 철거)

2020. 1.

서울시 도시기반시설본부

(토  목  부)

- 개봉철도고가 성능개선 공사 -

실정보고 검토 보고

(철도보호지구 내 EGI휀스 설치 및 철거)

「개봉철도고가 성능개선 공사」 감리단에서 제출한 실정보고 사항에 대하여 검토 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

❍ 한국철도시설공단(수도권본부장)(안전혁신처-10252, 2019.9.26.)

❍ 업무지시전(철도보호지구내 저촉시설물 협의결과 통보) (서울특별시 도시기반시설본부 19-11180, 2019.09.27)

❍ 실정보고(EGI휀스 설치 및 철거 변경)(유신개철20-14호, 2020.1.15.)

Ⅱ		공사개요

❍ 공 사 명 : 개봉철도고가 성능개선공사

❍ 위    치 : 서울시 구로구 개봉동 235

❍ 사업규모 : 교량성능개선(DB18→DB24) B=23m, L=149m

❍ 공사기간 : `19. 5. 3. ~ 21. 11. 2.

❍ 도 급 비 : 13,241백만원

❍ 시 공 사 : 홍익산업개발(주)

❍ 감 리 사 : ㈜유신 외 2개사

Ⅲ		지시내용

❍ 철도보호지구내 저촉시설물 협의

- 철거철도보호지구내 우리 공사로 인하여 기존 시설물이 철거되는 등 공사부지 확보 및 외부인 등 출입자 통제를 위한 EGI휀스 설치(철거)에 대한 협의결과 통보에 따른 설계변영 및 공사추진 철저

Ⅳ		건설사업관리단 실정보고

□ 검토내용 : 열차안전운행 확보 및 철도시설 보호를 위하여 가교 하부에 외부인 및 출입자 통제를 위한 E.G.I휀스 설치 적정성 검토

□ 검토결과

◯ 수량 증·감

공 종	설치 위치	단위	수 량 (m)		증·감(△)	비 고
			당초	변경
EGI휀스	①옹벽(남부순환로)	m	48	47	△ 1
	②옹벽(우회도로)	m	23	17	△ 6
	③철도부지(한영대)	m	49	43	△ 6
	④철도부지(철도건축팀)	m	38	38	-
	⑤철도부지(철도건축팀입구)	m	24	16	△ 8
	⑥철도부지(두산아파트)	m	-	42	42
	계		182	203	21
EGI쪽문	①옹벽(남부순환로)	개소	-	1	1	신규
EGI양개도어	②옹벽(우회도로)	개소	-	1	1	신규
EGI양개도어	③철도부지(한영대)	개소	-	1	1	신규
폴딩도어	⑤철도부지(철도건축팀입구)	개소	-	1	1	신규
EGI쪽문	⑥철도부지(두산아파트)	개소	-	1	1	신규
	계		-	5	5

◯ 공사비 증·감

공 종 명	규 격	금 액		증·감(△)	비고
		당 초	변 경
4. 부대공
9)EGI휀스 설치 및 철거
E.G.I휀스 설치 및 해체	0.5*2.5(24개월)	7,981,610	8,902,565	920,955
E.G.I휀스 양개도어 설치 및 해체	3.0H*6.0L(24개월)	-	2,721,970	2,721,970	신규
E.G.I휀스 쪽문 설치 및 해체	2.0H*1.0L(24개월)	-	362,928	362,928	신규
폴딩도어 설치 및 해체	6.0H*8.0L(24개월)	-	4,536,618	4,536,618	신규
직접공사비 계		7,981,610	16,524,081	8,542,471
간접공사비 계		2,338,390	4,835,919	2,497,529
도급공사비		10,320,000	21,360,000	11,040,000
관급자재비		-	-	-
이설비		-	-	-
총공사비		10,320,000	21,360,000	11,040,000

◯ 검토의견

- 시공사가 제출한 수량 및 사업비는 적정한 것으로 판단됨에 따라 설계변경에 반영하는 것이 적정하다고 판단됨.

Ⅴ		검토의견 및 조치계획

❍ 건설사업관리기술단이 검토한 EGI휀스 설치 및 철거 건은 안전을 위하여 설치하는 것이 타당하고 이에 따른 수량 및 사업비는 적정한 것으로 판단됨에 따라 감리단 의견대로 설계변경에 반영토록 통보하고자 함.

붙임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.