문서번호	토목부-1302
결재일자	2020.1.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김동수		최진우	01/17 김용제
협조

- 개봉철도고가 성능개선 공사 -

실정보고 검토 보고

(가설도로 및 톤마대 쌓기, 헐기)

2020. 1.

서울시 도시기반시설본부

(토  목  부)

- 개봉철도고가 성능개선 공사 -

실정보고 검토 보고

(가설도로 및 톤마대 쌓기, 헐기)

「개봉철도고가 성능개선 공사」 감리단에서 제출한 실정보고 사항에 대하여 검토 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

❍ 공사계약 일반조건: 제19조, 19조 2항

❍ 실정보고(공사용 가설도로 및 톤마대 설치)(유신개철20-16호, 2020.1.15.)

Ⅱ		공사개요

❍ 공 사 명 : 개봉철도고가 성능개선공사

❍ 위    치 : 서울시 구로구 개봉동 235

❍ 사업규모 : 교량성능개선(DB18→DB24) B=23m, L=149m

❍ 공사기간 : `19. 5. 3. ~ 21. 11. 2.

❍ 도 급 비 : 13,241백만원

❍ 시 공 사 : 홍익산업개발(주)

❍ 감 리 사 : ㈜유신 외 2개사

Ⅲ		감리단 실정보고 내용

□ 검토내용 : 개봉철도고가 성능개선공사와 관련하여 우회도로(가교)설치 및 지장수목 이식을 위하여 필요장비의 자재 진입과 반출을 위한 공사용 임시도로 개설의 설계변경(물량 및 사업비)의 적정성 검토.

□ 가설도로 설치 개요

◯ 위    치 : 시점부 옹벽부위 개수로, 종점부 개수로

◯ 규    모

- 시점부 : 흄관(D900mm, 3열 × 25m) 설치 및 톤마대 설치

- 종점부 : 흄관(D900mm, 3열 × 25m) 설치 및 톤마대 설치

◯ 위치도 및 단면도

□ 공사 물량 및 사업비 검토

◯ 공사물량 검토(증·감)

공 종 명	규 격	단위	수 량 (m)		증·감(△)	비 고
			당 초	변 경
4. 부대공
1) 공사용 가설도로 및 톤마대 쌓기, 헐기
톤마대 쌓기	0.9m*0.9m*1.1m	개	-	180	180	신규
톤마대 헐기	0.9m*0.9m*1.1m	개	-	180	180	신규
흄관 접합 및 부설	D900	본	-	30	30	신규
되메우기 및 다짐(토사)		㎥	-	234	234
혼합기층공		㎥	-	57	57
무근콘크리트깨기		㎥	-	70	70
폐기물운반		㎥	-	70	70
집적 및 상차(파쇄물)		㎥	-	70	70

◯ 공사물량 검토(증·감)

공 종 명	규 격	금 액		증·감(△)	비고
		당 초	변 경
4. 부대공
1) 공사용 가설도로 및 톤마대 쌓기, 헐기
톤마대 쌓기		-	5,176,260	5,176,260	신규
톤마대 헐기		-	1,748,520	1,748,520	신규
흄관 접합 및 부설		-	11,184,270	11,184,270	신규
되메우기 및 다짐(토사)		-	891,306	891,306
혼합기층공		-	207,366	207,366
무근콘크리트깨기		-	1,381,450	1,381,450
폐기물운반		-	581,420	581,420
집적 및 상차(파쇄물)		-	217,980	217,980
직접공사비 계		-	21,388,572	21,388,572
간접공사비 계		-	12,511,428	12,511,428
도급공사비		-	33,900,000	33,900,000
폐기물 처리비 및 운반비		-	5,000,000	5,000,000
총 공사비		-	38,900,000	38,900,000

◯ 검토의견

- 우회도로(가교)설치 및 지장수목 이식에 필요한 장비 및 자재 진입이 가능하도록 공사용 임시도로 개설이 필요함.

- 공사용 임시도로를 횡단하는 수로구간은 흄관을 설치하여 수로로 인한 단절이 없도록 계획하였으며, 단차가 발생하는 구간는 톤마대를 설치하여 토사유출에 의한 환경피해가 없도록 하겠음.

- 원활한 공사 진행을 위해서 공사용 임시도로 설치는 필요하다고 판단되므로 실정보고 승인 후 설계변경을 반영하여주시기 바랍니다.

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

❍ 가설도로 설치는 공사 장비 진입을 위하여 필요한 시설이므로 원활한 사업추진을 위해 우선 설치하고,

❍ 사업비가 5천만 원 미만이므로 추후 설계변경에 반영할 수 있도록 감리단에 통보하고자 함.

붙임  1. 감리단 공문 및 실정보고 각 1부.  끝.