문서번호	건축부-941
결재일자	2020.1.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
김완선		신추교	01/17 임인구
협조	광역도로과장		박일연
	주무관		이한규

「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」

문화재 기술지도 자문위원단 구성 계획

2020. 1.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」

문화재 기술지도 자문위원단 구성 계획

「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」에 포함된 문화재 담장을 복원하는데 필요한 문화재 기술지도 등을 위해 다음과 같이 자문단을 구성하여 문화재 복원에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		공사 개요

○ 공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사              (지하차도 상부 상책로 조성공사 포함)

○ 위    치 : 종로구 권농동 8 ~ 원남동 166

○ 공사규모 : 도로확장 4→6차선, 연장 800m, 지하차도 320m 문화재복원(담장 498m, 북신문 1개소, 협문 2개소)

****************************

************************************

************************************

**********************************

*************

위치도	조감도

Ⅱ		추진경위

○ ′08.01.28. : 시장 지시사항 제244호

○ ′08.02.10. : 사업계획 수립(부시장 방침)

○ ′09.02.11.~′10.05.31. : 기본 및 실시설계용역

○ ′10.10.11. : 공사 착공

○ ′11.12.23. : 문화재 정밀발굴조사 완료

○ ′17.08.23. : 문화재 현상변경허가 변경사항 심의(13차)

※ 시·종점부 협문 설치, 터널 상부 보행로, 울타리, 조경 정비, 폐쇄회로(CCTV) 설치 등

○ ′19.11.11. : 터널 상부 시공방법 자문회의 개최(토목부)

○ ′19.12.30. : 지하차도 임시개통(6차선)

Ⅲ		기술지도 자문단 구성 및 자문계획

○ 자문일정 : 필요시 수시 개최

*************

**	******	*****	****	***
*	*****	*********	******** ******
*	*****	*********	*********** *****
*	*****	*********	***

○ 주요 기술지도 자문 내용 --- 자문내용은 문화재청 통보

- 담장, 북신문 등 구조물 세부 복원 방안

- 담장의 판축다짐에 대한 복원 방법 등

- 공사내용 중 미흡한 사항의 사전 보완사항 점검

- 공사품질 확보 및 하자 발생 예방을 위한 사전 기술 지도 등

Ⅳ		향후계획

○ ′20.02.       : 기술지도 자문단 회의 개최

○ ′20.03.~12. : 터널상부 복토, 건축 담장 설치

○ ′21.01.~06. : 상부 산책로 및 조경공사 시행

Ⅴ		행정사항

○ 문화재청 보수지침에 따라 문화재기술지도 자문단을 구성

- 기술지도 자문 결과를 담장 복원에 반영

○ 매자문 시 자문위원 수당지급 비용

************************

********************************

******************************

****************************************

○ 예산과목 : 도시기반시설본부 토목부, 간선도로망 확충(도시개발특별), 율곡로(창경궁앞)구조개선, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 안전총괄실 도로계획과).

붙 임 : 1. 자문위원 검토의견서 1부.                                2. 자문위원 참석명부 1부.  끝.