문서번호	시설보수과-129
결재일자	2020.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설보수과장	난지물재생센터소장
김승조	조선행	01/20 한성현
협 조
	주무관		최기문
	주무관		장보규

『2020년 공통분야 유지보수 시설비』시행계획

2020. 1.

시설보수과

『2020년 공통분야 유지보수 시설비』시행계획

난지수계 차집관로의 원활한 하수소통 및 센터내 노후 시설물을 적기에 정비하여 지속적이고 체계적인 유지관리를 통한 환경보호 및 안전 저해 요인을 사전에 해소코자 함.

Ⅰ				예산확보 현황

구분	사업 현황	예산액 (백만원)	발주예정	비 고 (담당자)
계		14,780
차집관로	불광천 차집관거 보수공사(사각)	2,500	3월	김승조
차집관로	홍제천 차집관거 보수공사(사각)	2.500	3월	김승조
차집관로	난지수계 차집관로 준설공사	490	2월	최기문
차집관로	하수 차집시설물 유지보수공사	680	2월	김승조
차집관로	차집관로 준설토 처리용역	80	2월	김승조
차집관로	불광천/홍제천 차집관로 물막이 및 정밀안전진단	2,000	4월	김승조
센터시설물	토목시설물 유지보수공사	480	2월	김승조
센터시설물	건축시설물 유지보수공사	880	2월	장보규
센터시설물	최초침전지 보수공사	1,800	3월	장보규
센터시설물	소화조 보수공사	450	3월	최기문
센터시설물	건설폐기물처리용역	20	3월	장보규
센터시설물	분뇨처리장 유지보수공사	2,600	3월	최기문
센터시설물	공통분야 전기설비 보수공사	300

Ⅱ				추진방향

사업 조기집행을 위하여 2020년 3월중 가능한 모든 사업 발주

사업 추진일정 및 관리 철저로 예산 낭비 방지

공사장 안전관리 및 공정관리 강화로 부실공사 방지

Ⅲ				세부 추진계획

차집관로 보수공사(홍제천 및 불광천 보수)

○ 소요예산 : 5,000백만원

- 불광천(사각) 2,500백만원, 홍제천(사각) 2,500백만원

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 제9조 및 동법 시행령 제7조 규정에 의한『토목공사업』  또는 『토목·건축공사업』등록업체로서 서울시에 주된 사무소가 있는 업체

○ 공법선정

- 2017년 난지수계 차집관거 조사 용역에서 선정한 5개 공법을 대상으로 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 심의 의결된 결과에 의거 기술(특허) 시용협약 체결된 공법 적용 예정

※ 신기술(특허)공법 적용 사유 : 홍제천 및 불광천의 차집관로 매설지역은

생태하천으로 조성되어 있어 많은 시민이 찾는 휴식공간으로 84년 ~

87년 매설되어 관 노후 및 세굴이 상당부분 진행되어 오수 누수로 인

한 환경오염과 민원이 발생되는 지역으로 현장여건에 맞는 유리한 공법

선정 필요

○ 공사 세부내용

- 홍제천 차집관거 보수(사각) : 1,415m(□ 1.5×1.5m)

- 불광천 차집관거 보수(사각) : 1,000m(□ 1.8×1.8m)

○ 발주 예정일 : 2020년 3월 시행예정

난지수계 차집관로 준설공사(연간단가)

○ 소요예산 : 490백만원(차집관거 준설 490백만원)

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 시행령 별표1에서 정한 『상하수도설비공사업』 등록업체

로서 서울시에 주된 사무소가 있는 업체

- 2020년 2월중 서울특별시 특정기술 선정심사위원회에서 특허공법 적정성 심의 의결된 결과에 의거 기술(특허) 시용협약 체결된 공법 적용

※ 특허공법 적용 사유 : 우리센터의 차집관로는 암거형태로 맨홀을 통

하여만 준설이 가능한 구조로 유수의 흐름을 차단하지 않고 준설이 가

능한 특허공법 선정 필요

○ 과업세부내용

- 차집관로 준설 : 한강 외 10개 지천 2,300㎥

○ 발주 예정일 : 2020년 2월 시행예정

난지수계 하수차집시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 소요예산 : 680백만원

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 제9조 및 동법 시행령 제7조 규정에 의한『토목공사업』        또는 『토목·건축공사업』등록업체로서 서울시에 주된 사무소가 있는 업체

○ 과업세부내용

- 사각맨홀뚜껑 설치 : 8개소

- 상‧하반기 차집시설물 안전점검 결과 조치 등

○ 발주 예정일 : 연간단가 사업으로 2020년 2월중 발주

차집관로 준설토 처리용역

○ 소요예산 : 80백만원

○ 입찰방법 : 제한경쟁(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 폐기물관리법 제25조의 규정에 의한 폐기물 수집 운반업(사업장생활

폐기물)과 폐기물중간재활용업(지정폐기물 외 폐기물) 허가를 득하고,

주된 영업소가 서울시 또는 경기도에 소재한 업체로서 영업대상폐기

물이 준설토인 업체

○ 과업세부내용

- 준설토 운반 처리 : 2,000ton

○ 발주 예정일 : 준설공사와 병행하는 사업으로써 2020년 2월중 발주

토목시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 소요예산 : 480백만원

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 제9조 및 동법 시행령 제7조 규정에 의한『토목공사업』         또는 『토목·건축공사업』등록업체로서 서울시 또는 경기도에 주된 사무소가         있는 업체

○ 과업세부내용

- 센터내 도로정비 : A=5a

- 센터내 조경공사 1식, 시설물 보수 1식

- 시설물 안전점검 지적사항 조치 등

○ 발주 예정일 : 연간단가 사업으로 2020년 2월중 발주

건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 소요예산 : 880백만원

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 제9조 및 동법 시행령 제7조 규정에 의한『시설물 유지관리업』등록업체로서 서울시 또는 경기도에 주된 사무소가 있는 업체

○ 과업세부내용

- 건축시설물 창호, 방수, 도장 등 보수

- 관사 아파트 보수 등

○ 발주 예정일 : 연간단가 사업으로 2020년 2월중 발주

시설물 보수공사(최초침전지, 소화조,분뇨처리장)

○ 소요예산 : 4,850백만원

- 최초침전지 1,800백만원, 소화조 450백만원, 분뇨처리장 2,600백만원

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 시행령 별표1에서 정한 『시설물 유지관리업』 등록업체

- 토목‧건축시설물 안전점검 용역에서 제안한 10개공법중에서 서울특별시 특정기술 선정심사위원회(2월 개최 예정)에서 특허공법 적정성 심의 의결 결과에 의거 기술(특허) 시용협약 체결된 공법 적용

※ 특허공법 적용 사유 : 최초침전지 등 시설물은 가스 발생 및 콘크리트 손상 요인이 있어 이에 적합한 특허공법 선정 필요

○ 과업세부내용

- 제2처리장 최초침전지 5개지

- 소화조 1개지(제2처리장 c지)

- 분뇨처리장 저류조 2개지 보수

※ 2020년 정비하면 전체 11개지 보수완료

○ 발주 예정일 : 2020년 3월중 발주

건설폐기물 처리용역(연간단가)

○ 소요예산 : 20백만원

○ 입찰방법 : 전자공개수의계약(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설페기물의 재활용 촉진에 관한법률 제21조에 의한『페기물 수집, 운반업(건설폐기물)과 폐기물 중간처리업 허가를 득한 업체』, 폐기물 수집·운반만 가능한 업체는 폐기물 중간처리 업체와 공동도급이 가능한 업체로서 서울시 또는 경기도에 소재한 업체

○ 과업세부내용

- 폐기물 운반 300톤

- 폐기물 처리 300톤

○ 발주 예정일 : 토목시설물 유지보수공사와 병행하는 사업으로써 2020년 1월중 발주

Ⅳ				향 후 계 획

2020. 1. : 현장조사 및 물량 산정

2020. 2. : 설계 및 수입물품 및 특정제품 선정위원회에서 특허공법 선정

2020. 3. : 계약 및 공사착공.   “끝”.