문서번호	행정지원과-1433
결재일자	2020.1.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리팀장	행정지원과장
방만천		강정환	01/20 박달경
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수’

「비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」

실정보고서 검토보고

2020. 1. 20.

서부수도사업소

【행정지원과】

「비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」실정보고서 검토보고

「비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」와 관련하여 시공사((주)수인엔지니어링)로 부터 실정보고서가 접수되어 검토 후 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명:「서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」

○ 공사기간: 2019. 10.14.~12.20.

○ 공사내용: L=22.0m, H=10.3m, 기대기식옹벽, 낙석방지망 등

○ 시공업체: ㈜수인엔지니어링

□ 실정보고 현황

○ 보고내용: 공정추가 및 물량변경에 따른 설계변경

○ 설계변경 금액 내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	비고(증․감)
도급비	총 공사비	***********	***********	***********

□ 검토결과 및 조치계획

○ 검토결과: 공정별 변경물량 및 공정추가분에 대한 사전검토 등 시공사와 협의 완료

○ 조치계획: 설계변경 자체(사업소)심사 후 설계변경 시행

- 시공사에서 실정보고 제출된 변경내역서 수정 후 재제출지시

붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(검증반영)

3. 원가계산 검증확인서 1부.