문서번호	서울특별시아동복지센터-880
결재일자	2020.1.21.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

						시 민
주무관	사업지원팀장		아동복지센터소장		가족담당관		여성정책담당관
최웅의	김경래		이현숙		김복재		01/21 윤희천
협 조
	열빛총괄과장					여인웅
	★서무팀장					이부열

2020년도 아동복지센터

청사 전기선로 정비 추진계획

2020. 01.

서울특별시아동복지센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	☑	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	☑
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	☑
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	☑
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	☑	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	☑
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	☑
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	☑	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	☑	□

2020년도 아동복지센터

청사 전기선로 정비 추진 계획

노후 청사의 전기선로 교체 등 정비를 통하여 안정된 전력 공급 및 전기 안전관리에 철저를 기하여 안전하고 쾌적한 청사관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		일반현황

□  소 재 지 : 서울 강남구 광평로34길 124(수서동 산4-1 외4필지)

□  규    모 : 대지 25,808㎡, 건물 연면적 2,290㎡

□  구조/지붕 : 철근콘크리트조/경슬라브 평슬라브

□  주 용 도 : 노유자시설

□  준공일자 : 1998.11.19

□  기술용역타당성 심사필 : 2019.10.31.(제2050차)

Ⅱ		사업개요

사 업 명 : 청사 전기선로 정비

사업내용 : 세부내용 붙임 “과업지시서” 참조

□  청사 내 전기선로 전면 교체

- 전기설비 수배 전반 교체

- 발전기 교체

- 전선 전반 교체

- 분전반 및 차단기 교체

□  청사 외부 전기 선로 등 보수

- 청사 주변 보안등 전기선로 및 등기구 교체

□  전기 승압 : 수전용량 200㎾ → 300㎾

- 발전기 교체

소요예산 : 444,382천원(시비)

(단위 : 원)

구 분	사 업 비	비 고
계	444,382,000
설계비	12,191,000	공사원가의 3.3%
감리비	12,191,000	공사원가의 3.3%
공사비	420,000,000

※ 설계 및 감리비는 관련 부서의 협의에 딱라 조정될 수 있음

예산과목

□  여성가족정책실, 아동복지센터, 아동복지 서비스 증진, 아동복지센터 운영, 아동보호전문기관 운영(자체), 시설비(100-401-01)

Ⅲ		사업추진계획

사업계획 수립 : 서울특별시아동복지센터

□  아동복지센터에서는 다음과 같은 사유로 도시기반시설본부로 공사의뢰

- 아동복지센터 내 관련 전문가 부재

- 자체 사업진행시 부실공사 우려가 있으며, 목적 사업의 완성에 대하여도 안정성을 담보하기 어려워 관련 전문부서에 공사의뢰 필요

- 적정한 예산집행 및 공사실시로 사업목적에 맞는 전기선로 정비

- 건축(인테리어 등) 분야 필요시 도시기반시본부(건축부)로 의뢰

□  설계용역 및 공사시행 : 도시기반시설본부(설비부)

- 아동복지센터의 예산 재배정 이후 설계용역 및 공사시행

추진일정

□  2020. 1월 : 사업추진 계획 수립(서울특별시 아동복지센터)

□  2020. 2월 : 설계 및 공사시행 의뢰(아동센터→도시기반시설본부)

□  2020. 3～4월 : 설계용역 실시(도시기반시설본부)

□  2020. 5～7월 : 공사시행 및 준공(도시기반시설본부)

사업비 정산 : 사업완료 후 1개월 이내

시설관리 : 공사준공 후 아동복지센터에서 관련시설 사후관리

Ⅳ		기대효과

관련 규정에 적합한 최적의 공사 시행으로 시정의 신뢰도 향상

운전 및 유지보수의 편의성을 감안한 경제적 공사 시행

사업의 적기 추진

노후 전기설비 정비로 안정적 전력 공급 및 안전도 향상

Ⅴ		행정사항

사업계획 수립 및 시행요청 : 아동복지센터

□ 예산 재배정시 사업 진행이 될 수 있도록 예산재배정과 동시에 사업시행 요청

설계 및 공사시행  : 도시기반시설본부(설비부)

붙  임 : 1. 과업지시서(견적서 포함) 1부.

2. 제2050차 기술용역 타당성심사 결과 통보 1부.  끝