(문정주)업무인계ㆍ인수서(2020.1.17. 발령일 후)

1. 업무별 진행사항 등

가. 수유6배수지 건설공사 관리 업무

1. 시설공사 : 장기계속공사로 현재 4차(’20년) 계약 완료

· 4차분 품질시험계획서 검토 후 승인 필요

· 조경공사 마무리를 위한 되메우기용 토사 반입 필요(3월 중순까지)
(※ 토석정보시스템 등록 및 유관기관에 협조 공문 발송완료, 필요시 건축허가 현장 섭외 필요)

· 구조물 및 송배수관 부설 완료되어 배수지 담수 및 통수 계획 수립 필요

· **********************************************

· ************************************************

(※ 최종 입력후, 도로굴착시스템에 GIS 입력 파일 업로드 필요)

· *********************************************

· *****************************************

· *******************************************

· 키스콘 승인 처리를 위한 아이디 발급 필요

· 대금e바로 처리를 위한 담당자 변경(매월 노임 등 청구시 승인 필요)

· 기타사항은 국토부 ‘건설공사 사업관리방식 검토기준및업무수행지침’에 따라 처리

2. 감리용역 : 낙산 및 수유6현장 통합발주하여 4차(‘20년) 계약 완료

· ****************************************

· ***************************************

· 용역관련 변경, 기술자 투입 및 철수 시 건설기술용역업 통합관리시스템
(www.cems.kr-한국건설기술관리협회)에서 처리

3. 건설폐기물처리용역 현재 2차(‘20년) 계약 완료

· 올바로시스템 처리를 위한 담당자 변경

· 당일 현장 출입차량은 계근 전까지 올바로시스템에 반드시 입력

· 주말 반출 등을 고려하여 스마트폰 앱 설치 후 사용 필요

· 계속공사의 경우 전년 반출 실적을 익년 2월 말까지 실적등록(※2019년 실적 등록필요)

· 1년 공사 또는 계속공사가 준공 된 경우 준공 후 15일 이내 실적등록(※준공시 등록필요)

· 공기 연장시 폐기물 처리용역도 관할 구청에 변경 신고하고 한국환경공단에 팩스 전송하여 배출기간 연장

4. 계측관리용역은 최종 준공 완료

· ***************************

나. 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 소송수행 업무

1. 지연배상금 관련

· *********************************

2. 간접비·추가공사비 지급 관련

· ******************************************

3. **************************************************************************************

4. ************************************************

다. 건설공사 품질 및 교육에 관한 사항 총괄

1. 품질시험소(품질지도과) 순회 교육 예정(’20.4.10. 14시 예정)

· 교육 희망일자 등은 공문 시행 완료

· 본부 안전총괄과에서 안전관련 교육과 병행 시행 예정(※ 세부 일정 협의 필요)

라. 건살공사 대장관리 업무 및 경력실적 증명 업무

1. 기술심사담당관에서 시달한 지침에 따라 처리
(※기심-7431호, ’19. 4.12./ 기심-23759)

위와 같이 인계ㆍ인수합니다.

2020년  1월  21일

작성자	주무관	문정주
인수자	주무관	박상권
인계자	주무관	문정주
입회자	주무관	정성오
입회자	시설과장	전결 01/21 송병욱