투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	「어린이놀이터 미끄럼틀 정비공사」설계변경(정산) 시행

1. 조경과-440(2020.1.20.)호와 관련입니다.

2.「어린이놀이터 미끄럼틀 정비공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 어린이놀이터 미끄럼틀 정비공사

나. 공사내용 : 미끄럼틀 철거 및 설치 등

다. 공사기간 : 2019. 12. 9. ~ 2020. 2. 17.

라. 계 약 자 : 보람개발 대표 이옥희

마. 계약금액

구 분		금 액		증·감
		당 초	변 경
총 공 사 비		31,444,000	30,915,000	감 529,000
도급액	공 급 가 액	28,585,455	28,104,546	감 480,909
	부가가치세	2,858,545	2,810,454	감 48,091

바. 설계변경 사유 : 미집행 경비 사후정산에 따른 제경비 등 정산

사. 예산과목 : 서울대공원 조경과, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 조경시설물 설치 및 정비, 시설비및부대비, 시설비(사고이월)

붙임  1. 설계변경(정산) 방침서 1부.

2. 설계변경(정산) 내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

주무관							곽연희			주무관					김흔진					조경과장					01/21 김강환
협조자				주무관						정한성					총무과장							유연호
시행			조경과-452									(						)		접수											(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102															/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		02-500-7522						/전송			02-500-7993					/	kyh8917@seoul.go.kr												/	부분공개(5)