문서번호	급수운영과-1230
결재일자	2020.1.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김태승	이일로	01/21 이용구
협 조

『시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사』

실정보고서 제출에 따른 검토

2020. 1.

남부수도사업소

(급수운영과)

『시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사』

공사실정 보고에 따른 검토 보고

우리사업소에서 발주하여 시설공단에서 감독 중인 “시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관정비공사”에 대한 공사실정 보고에 대한 검토 결과를 보고 드림

※ 관련문서 : 공사감독2처-375(2020.01.14.)

***공사현황

○ 공 사 명 : 시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사

**************************************.

************************

*******************************

****************************

*******************

2. 보고내용 및 검토의견

구분	시설공단 보고 내용	우리사업소 검토 의견
일부공종 및 수량누락	〇 당초 설계 내역서의 계약된 공종 중 일부 공종 및 수량이 누락되어 설계 내역서에 반영되어야 함.	〇 위 공사의 원활한 진행을 위하여 당초 설계 내역서에 누락된 공종 및 수량에 대해 실 시공 후 정산 내역을 설계변경 시 반영하는 것이 타당하다고 사료됨.

3. 조치의견

○ 상기 검토의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 시설공단에 통보하여 공사 시행에

차질 없도록 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 시설공단 실정 보고서 1부.

2. 공사현장 실정보고서 1부.

3. 실정보고 누락 공종 및 수량 산출서 1부.  끝.