문서번호	설비부-1074
결재일자	2020.1.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	01/22 代여인웅

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』

설계보완 실정보고 사항 검토 보고

2020. 1.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』

설계보완 실정보고 사항 검토 보고

『동부간선도로 확장(1-2공구) 공사』와 관련, 유지관리기관 요청사항 및 설계 미반영 사항 반영을 위한 실정보고 내용을 검토하고 보고 드림

1		공사현황

공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사

❍ 공사위치 : 노원구 월계1교 ~ 창동교

❍ 공사규모 : (1공구)도로확장 4→6차로, L=1,4km(지하차도 402m)

(2공구)도로확장 4→6차로, L=3.2km(지하차도 2.9km)

❍ 주요설비 : 비상전화, CCTV, 도로전광표지판, 영상검지기, 라디오재방송

❍ 공사기간 : 2008.12.29 ~ 2020.12.31.

❍ 도 급 비 : 1,347백만원

❍ 감 리 단 : (1공구)㈜도화엔지니어링, (2공구)㈜이산

❍ 시 공 사 : ㈜퓨젼아이앤씨

2		검토내용

관련근거

❍ 통신공사 실정보고(5차)[동부2감 19-494호(2020.01.20.)]

❍ 설계사 검토의견 회신[경화 제2019-430호(2019.07.)]

실정보고 내용

❍ 실정보고 사유

- 유지관리기관(서울시설공단, 북부도로사업소) 요청사항 반영

- 현장여건 반영 및 미반영된 설계 보완

품 명	증 감	변경사유
1. CCTV 설비공사	개략 증)17,087천원
강제전선관(54mm)	감 21m	○ 홈파기작업으로 인한 터널 벽면 손상을 최소화하기 위한 매입배관 규격 변경(82C→28C)
강제전선관(82mm)	감 33m
강제전선관(28mm)	증 30m
CCTV용 POLE(4m)	증 2본	○ 관급자재 구매 품목에서 제외된 품목에 대해 도급 내역에 반영
CCTV용 POLE(15m)	증 1본
POLE 기초	증 3ea
HUB(L3 스위치)	증 1대
2. 정보표지판 설비공사	개략 감)6,367천원
강제전선관(28mm)	증 60m	○ 홈파기작업으로 인한 터널 벽면 손상을 최소화하기 위한 매입배관 규격 변경(104C→28C)
강제전선관(54mm)	감 20m
강제전선관(70mm)	감 10m
강제전선관(82mm)	감 20m
강제전선관(104mm)	감 10m
3. 라디오재방송 설비공사	개략 증)105,811천원
동축케이블	증 368m	○ 무선스피커 전원케이블은 가로등 전원케이블과 공통배관(22D)에 포설하는 것으로 계획되었으나 케이블 포설 불가하여 노출배관 추가 설치 ○ 설계에 미반영된 지하차도 무선스피커 전원케이블 배관 및 풀박스 설계 반영
동축케이블 커넥터	감 1,445개
셋트앙카	증 1,566개
무선스피커 전원케이블	증 702m
폴리에틸렌 전선관	증 51m
강제전선관	증 1,275m
풀박스(벽면)	증 118개
4. ITS 설비공사	개략 증)80,198천원
광케이블 포설	증 1,700m	○ 유지관리부서(서울시설공단) 요청사항 반영 - 1-3공구 통신시설물을 도봉지하차도 통합관리 하기위해 옥외 광케이블 규격변경 및 물량조정
쾅케이블 코어접속	증 120코어
강제전선관	증 300m
폴리에틸렌 전선관	증 1,500m
터파기/되메우기	증 1,008m²
맨홀	증 4개
구조안전진단	증 1식	○ 북부도로사업소 요청사항으로 창동교 배관 횡단을 위한 구조안전진단 시행

❍ 주요 변경내용

❍ 적용단가 검토

- 기존비목 : 증감내역 – 계약단가 적용

- 신규비목 : 물가자료 및 견적서의 최소단가 × 낙찰률 적용(87.747%)

- 노 무 비 : 2019년 하반기 노임표 적용

❍ 개략 공사비 증감 현황

(단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총차	직접공사비	563,185	709,135	145,950
	간접공사비	119,578	152,473	32,895	제경비 포함
	부가가치세	68,276	86,161	17,885
	합 계	751,039	947,769	196,730

책임건설사업관리기술자 검토의견

❍ 유지보수기관 요청사항 및 설계내역 미반영 사항 반영에 대한 실정보고를 검토한 결과 수량 및 적용단가가 적정하게 산출되었으며, 추후 설계변경에 반영하는 것이 타당함.

검토결과 조치의견

❍ 건설사업관리기술자의 실정보고 내용이 적절하다고 판단되므로 실정보고 승인하고, 추후 설계변경 시 설계변경 소위원회의 의견을 반영하여 총무부에 변경계약 의뢰하고자 합니다.

붙 임 : 건설사업관리기술단 공문 1부.  끝.