“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	문화재 감리계약 변경의뢰(남산 회현자락 한양도성 유적전시관)

우리본부에서 시행중인「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성공사 문화재상주감리 용역」에 대한 변경계약(총차 및 1차)을 의뢰하오니 처리해 주시기 바랍니다.

가. 계약내용

- 계약건명 : 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사 문화재 상주감리

- 계약상대자 : ******************

- 계약금액 : 총차 332,133,000원(1차 266,000,000원)

- 전체 계약기간 : 2018.11.9.~2020.4.13.(1차 2018.11.9.~2020.1.21.)

나. 총차 및 1차 변경내용 : 계약금액 및 준공기한(공사기간) 변경

구 분		변경전	변경후	증·감
계약 금액	총차	332,133,000원	441,933,000원	증) 109,800,000원
	1차	266,000,000원	325,830,000원	증) 59,830,000원
	2차	66,133,000원	116,103,000원	증) 49,970,000원
용역 기간	총차	2018.11.9.∼ 2020.4.13.	2018.11.9.∼ 2020.10.31.	201일 연장
	1차	2018.11.9.∼ 2020.1.21.	2018.11.9.∼ 2020.5.31.	131일 연장
	2차	2020.1.22.∼ 2020.4.13.	2020.6.1.∼ 2020.10.31.	70일 연장

- 용역기간 연장사유: 남산공원 매점 이전지연에 따른 공사기간이 연장됨에 따라 감리용역 기간을 연기함

다. 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 남산 회현자락 한양도성 보존·정비, 감리비

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 방침서(문화재 상주감리 변경계약 검토보고) 1부

3. 합의각서 및 산출내역서 등 관련서류 1부.  끝.

	한양도성도감과장
주무관	왕승찬		도성관리팀장	정일선		한양도성도감과장	01/17 안중호
협조자	계약2팀장	이정렬
시행	한양도성도감-692	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)