문서번호	소방행정과-654
결재일자	2020.1.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
신현대	민경대	최규태	01/17 이창식

“녹번·역촌119안전센터 환경개선사업”

설계용역 발주계획

2020. 1.

은평소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 녹번·역촌119안전센터 환경개선사업 -

설계용역 발주계획

녹번·역촌119안전센터 환경개선사업 설계를 전문가에게 의뢰하여 청사의 효율성 및 예산 지출성과를 극대화하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 소방행정과-7033(2019.7.2.)호 『역촌119안전센터 환경개선공사 설계 기술용역 타당성 심사 요청』

□ 서울시 기술심사담당관-12545(2019.7.4.)호 『제1200차 기술용역타당성심사 결과 통보』

□ 소방행정과-249(2020.1.8.)호 『녹번 ·역촌119안전센터 환경개선 추진계획』

□ 소방행정과-456(2020.1.14.)호 『녹번119안전센터 환경개선 설계 기술용역 타당성 심사 요청』

□ 서울시 기술심사담당관-1032(2020.1.15.)호 『제110차 기술용역타당성심사 결과 통보』

Ⅱ		사업개요

□ 녹번119안전센터 환경개선사업

○ 추진기간 : 2020. 1월 ~ 6월

○ 사업내용 : 1층 ~ 2층 (연면적 600㎡) 대기실, 식당 등 재배치 공사 및 노후화된 청사 시설물 개선

○ 사 업 비 : 금251,534,000원(금이억오천일백오십삼만사천원)

(소방관서 시설물 유지 보수 / 시설비 등)

시 설 비 (설계비 포함)	207,534,000	자산 및 물품취득비	30,000,000
감 리 비	4,000,000	사무관리비	10,000,000

□ 역촌119안전센터 환경개선사업

○ 추진기간 : 2020. 1월 ~ 6월

○ 사업내용 : 대기실 및 체력단련장 재배치, 센터장실, 식당 확장 및

노후화된 청사 시설물 개선

○ 사 업 비 : 금116,420,000원(금일억일천육백사십이만원)

(소방관서 시설물 유지 보수 / 시설비)

※ 자산취득비 및 사무관리비 미배정 ⇨ 역촌 증축사업 기사용

	《 추 진 경 과 》
- 역촌119안전센터 환경개선 기본계획 수립(19.6월) - 역촌 안전센터 설계 기술용역타당성 심사 요청(19.7월) ⇒ 적정【서울시 기술심사담당관】 - 녹번·역촌119안전센터 환경개선 추진계획 수립(20.1월) - 녹번 안전센터 설계 기술용역타당성 심사 요청(20.1월) ⇒ 적정【서울시 기술심사담당관】

Ⅲ		설계용역 발주계획

□ 계약상대자

○ 업체명 : 지우건축사사무소

○ 대  표 : 건축사 박진호

○ 주  소 : 서울시 종로구 새문안로3길 36 용비어천가 1004호

□ 소요예산 : 금13,981,000원(금일천삼백구십팔만일천원)

○ 녹번119안전센터 환경개선 : 금8,140,000원

○ 역촌119안전센터 환경개선 : 금5,841,000원

□ 용역기간 : 계약 체결일로 부터 40일간

□ 계약방법

○ 1인견적 수의계약 (전자수의시담)

○ 녹번119안전센터, 역촌119안전센터 사업 통합발주

▸ 근 거 : 지방자치단체 세출예산 집행기준 제2장(세출예산 운영을 위한 일반지침)

지방자치단체 세출예산 집행기준 / 제2장세출예산 운영을 위한 일반지침 / 1-6. 유사·중복사업의 통합발주 노력

• 사업내용이 유사하거나 중복되는 사업은 법령의 범위 내에서 통합발주를 위하여 적극 노력하여 지출성과를 극대화할 수 있도록 하여햐 한다.

• 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 의한 『동일구조물공사』 및 『단일공사』는 기본적으로 통합발주를 해야 하며, 예산 집행과정에서 단일사업으로 예상되는 경우에도 통합발주 하여야 한다.

○ 계약심사 구분 : 비대상(추정금액 2억원 미만)

▸ 근 거 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제3장(계약심사 운용 요령)

○ 일상감사 구분 : 비대상(추정금액 2천만원 미만)

▸ 근 거 : 서울특별시 일상감사규정 제4조(일상감사 대상)

Ⅳ		설계 추진방향

□ 공간구성 부분

○ 효율적 공간배치, 출동동선 확보

○ 안전센터 직원 필요 공간 충분 확보(의견 적극 수렴)

○ 환경개선 부분과 증축 부분의 조화

□ 구조·기계·전기 부분

○ 에너지 효율 향상

○ 면적 증가에 따른 설비 배관 및 보일러 용량 증설 검토

○ 전기 사용량 증가에 따른 전기 계약전력 증설 검토

○ 기존부분과 연계하여 소방방송설비 구획된 각 실에 설치

□ 기타

○ 안전센터 기본업무 유지 가능 여부 검토

○ 정확하고 신속한 설계 가능 여부 검토

○ 재시공 되는 마감재에 대한 내역서 면밀히 작성

○ 공사로 인한 민원 및 직원불편 발생 최소화 방안 강구

Ⅴ		향후 추진계획

□ 설계용역 계약 체결 : 2020. 1. 23.

□ 설계 추진 : 2020. 1. 24. ~ 2. 28.

○ 추진 중 직원 의견 수렴 및 중간·최종보고회 개최

○ 상반기 조기 사업 집행을 위한 설계 용역 신속 추진

□ 설계용역 대가 지급 : 2020. 3. 11.

□ 공사 입찰공고 및 계약체결 : 2020. 3. 12. ~ 3. 31.

□ 공사 시행 : 2020. 4. 1. ~ 5. 30.

□ 공사 완료 : 2020. 6. 1.

□ 대금 지급 : 2020. 6. 12.

※ 상기 일정은 사업 여건에 따라 변경 가능

붙임  1. 녹번·역촌119안전센터 환경개선 추진계획(방침서) 1부.

2. 녹번119안전센터 기술용역타당성 심사 결과 1부.

3. 역촌119안전센터 기술용역타당성 심사 결과 1부.

4. 과업지시서 1부.  끝.