문서번호	건축부-967
결재일자	2020.1.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
오명희		유현수	01/17 임인구
협조

『시립동대문 실버케어 센터 건립공사』

계약변경(1차 공기연장) 검토보고

2020.01.15.

도시기반시설본부

건 축 부

『시립동대문 실버케어 센터 건립공사』

계약변경(1차 공기연장) 검토보고

「시립동대문 실버케어센터 건립공사」와 관련 지장물 이설 협의 지연 등으로 인한 ‘공사기간 연장’(1차) 요청 건에 대하여 검토보고 드림.

1		공사개요

○ 위     치: 동대문구 답십리동 553,554번지

○ 규모/용도: 지하1층지상4층, 연면적 2,990㎡/노유자시설

○ 구     조: 철근콘크리트구조

○ 공사기간: *********************************************

○ 도급금액: ************************

○ 시 공 자: ㈜서유종합건설외 1개사

○ 감 리 자: ㈜펨코엔지니어링건축사사무소외 1개사

2		추진경위

○ ‘19.08.01.: 공사착공

○ ‘19.08.08.: 지장물 이전조치 요청(시공사→건축부)

○ ‘19.10.02.: 지장물 철거, 이전 및 추가공사 요청(어르신복지과→도기본)

○ ‘19.10.    : 철거작업중 매립폐기물 발견(성분검사 및 처리방안 검토)

○ ‘19.12.05.: 철도청 행위신고 협의 완료

○ ‘19.12.19.: 매립폐기물(폐토사 등) 실정보고 승인 통보

○ ‘20.01.15.: 1차공사 공사기간 연장 요청

3		계약변경 내용

□ 공사기간 변경

구 분		변경전	변경후	비 고
****	****	******************	******************	****
	****	******************	*******************	*****
****	****	**************	**************	****

□ 공사기간 연장 사유

*******************************************

*************************************************************

**********************************************************

*************************************

*****************************************************

□ 귀책사유: 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부: 미부과

4		책임건설사업관리기술자 검토의견

***********************************************************

********************************************

************************************************************************

5		처리의견

***************************************************************

붙 임: 건축 1차 계약분 공사기간 연장 실정보고 승인요청 1부.  끝.