＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(오류동 118-39 외 1개소 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『오류동 118-39 외 1개소 송배수관 정비공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 오류동 118-39 외 1개소 송배수관 정비공사

나. 공사개요: ********************

다. 계 약 자: *************

라. 계약기간: - 당초 2019. 9. 3. ~ 2020. 2. 14.

- 변경 2019. 9. 3. ~ 2020. 6. 24.

마. 예산과목: 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비(중블록별 무단수 급수체계 구축)

바. 준공기한 연기사유: 교통소통대책 심의 지연 및 동절기 굴착통제 조기시행 등

사. 변경금액                                                           (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감
도급비	계	*************	*************	*
	공급가액	***********	***********	*
	부가세	**********	**********	*

붙임  1. 준공기한 연기검토 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김정운		급수운영팀장	문병희		급수운영과장	01/20 김정수
협조자
시행	급수운영과-1367	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3948	/전송	02-3146-3989	/	jwjw5011@seoul.go.kr	/	부분공개(5)