문서번호	설비부-1060
결재일자	2020.1.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
마동훈		代유영선	01/22 임정규
협 조

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』

관급자재 구매 계약 취소 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.01.

도시기반시설본부

(설비부)

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』

관급자재 구매 계약 취소 보고

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』 관급자재 조달구매 납품기한 연장 불가에 따른 구매계약 취소에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 관급자재 구매계약 취소 요청 (책임건설사업관리기술자)

-  창덕궁감 2020-022(2020.01.21.)

-  관급자재(거주로조명설비구매 외 3건) 구매계약 취소

Ⅱ		사업개요

□ 공사명 : 창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사

□ 공사기간 : ‘19.01.11.~’20.01.10.(1차 : ‘19.01.11.~’19.09.30.)

□ 공사비 : 도급액 금1,069,240747원(1차 : 금532,000,000원)

□ 감리사 : ㈜경동엔지니어링, ㈜대한콘설탄트

□ 시공사 : ㈜유니시스엔지니어링

□ 공정율 : 16 %

Ⅲ		계약취소 내용

□ 대상 관급자재

계약번호 (납품요구번호)	계약자	품 명	금액(원)	납품기한
				당초	변경
*********** **************	*** ****	**********	**********	***********	****
*********** **************	*** ****	*********	*********	***********	****
*********** **************	*** ***	***************	**********	***********	****
*********** **************	*** ******	***************	**********	***********	****

□ 사  유 : 조달 구매계약 납품기한 연장 불가

○ 관급자재 설치 시기가 미도래 되어 납품기한을 연장하여야 하나, 제조 업체와

조달청간 계약 종결로 조달시스템 상 납기 연장이 불가하여 계약 취소.

□ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금부과여부 : 미부과

□ 건설사업관리자 검토결과

○ 제작사와 조달청간 계약 만료(현장 납품여건 미도래 및 계약기간 연장 불가)에

따른 구매계약을 취소하고, 추후 재구매하는 것이 타당하다고 판단됨

Ⅳ		보고자 의견

□ 납품업체 조달계약기간 만료로 조달청 시스템 상 납기 연장이 불가하여

계약취소 후 납품 물품이 조달등록되었을 때 재구매 요청하고자 함.

첨부 : 관급자재 구매계약 취소 요청(합의서 포함) 1부.  끝.