문서번호	조경과-1192
결재일자	2020.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
김도연	이현삼	01/22 문길동

- 2020년 우리동네 노후 쉼터(마을마당) 정비 -

동작구 양지 마을마당 등 3개소 정비 검토보고

2020. 1.

“2020년 우리동네 노후 쉼터(마을마당) 정비”

동작구 양지 마을마당 등 3개소 정비 검토보고

동작구에서 제출한 양지 마을마당 등 3개소 정비사업 추진계획과 ‘주민제안내용’의 적정 여부 등을 검토하고 아래와 같이 보고드림.

[동작구 공원녹지과-926(2020.1.17.)호]

□ 추진근거

○  서울특별시 시민참여예산제 운영 조례(조례 제6091호, ‘16.1.7.)

○  2020 시민참여예산사업(시정참여형·지역참여형) 선정 알림 및 예산편성 요청(시민숙의예산담당관-1508호, ’19.9.5.)

○  우리동네 노후 쉼터(마을마당) 정비 추진계획 알림(조경과-533호, ‘20.1.10.)

□ 사업개요

○  사 업 명 : 우리동네 노후 쉼터(마을마당) 정비

○  대 상 지

- 양지 마을마당(동작구 사당동 220-6)

- 패밀리 쉼터(동작구 상도동 259-116)

- 도화공원(동작구 상도동 244-183 등 8필지)

○  사업규모 : 5,199㎡

○  사업기간 : 2020. 1. ~ 6.

○  총사업비 : 630백만원(시설비)

○  사업내용 : 노후 시설물(바닥, 휴게시설 등) 정비, 수목 식재 등

위치도(양지 마을마당)	현황사진(양지 마을마당)
위치도(패밀리 쉼터, 도화공원)	현황사진(패밀리 쉼터)

□ 검토결과 : 적합

구 분	주민 제안	실행 계획	검토결과
대 상 지	동작구 사당동 220-6(양지 마을마당)	동작구 사당동 220-6(양지 마을마당)	적합
	동작구 상도동 259-116(패밀리 쉼터)	동작구 상도동 259-116(패밀리 쉼터)
	동작구 상도동 244-183 등 8필지(도화공원)	동작구 상도동 244-183 등 8필지(도화공원)
사업기간	‘20. 1. ~ 12.	‘20. 1. ~ 6. (6개월 공기단축)	적합
사 업 비	630백만원	630백만원	적합
제안취지	노후 마을마당 정비	노후 시설물(바닥, 휴게시설 등) 정비와 수목 식재 등	적합

□ 보고자 의견

○  삼천만그루 나무심기 조기 달성과 2020년 신속집행을 위한 공기단축은 적정하나 부실시공 없도록 관리감독이 필요하며,

○ 그 밖에 내용 및 사업취지는 주민제안과 동일하므로 사업승인하고 관련 절차 이행 후 사업비를 교부하고자 함.

붙임 : 1. 사업추진 계획서(동작구) 1부.

2. 주민참여 예산사업 추진절차 1부.  끝.