실정보고 검토서

공사명

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 성동구 용답동 243-3

· 규    모 : 총인 41.2만㎥/일

· 공사기간 : '17.9.13.~'20.4.24.

· 도 급 비 : 18,139백만원

· 시공사 : 엘림토건(주)외 2개사

· 감리단 : ㈜천일 외 3개사

· 설계사 : ㈜도화엔지니어링

실정보고 건명

외부방수 방수층보호재 반영

실정보고

사유

외부방수 시공시 시방서에는 보호재 설치가 명기되어 있으나 내역 반영은 없어 외부방수 방수층 보호재를 반영하여 시공하고자 함

건설사업관리단

검토의견

방수층보호재는 방수면의 보호를 위해 필요하며, 경제성, 시공성 및 시공사례가 많은 공법을 반영함.

공기에 미치는 영향

없음

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모		방수층보호재 4,518㎡	방수층보호재 4,518㎡
금액		26,070천원	26,070천원

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

필요없음

발주처

검토의견

외부방수 시공후 되메우기시 양질의 토사로 되메우기를 시행하더라도 골재 및 토사 등의 충격으로 외부방수면이 손상될 수 있으므로 방수층 보호재 설치가 필요함

비 고

결재

담당

유시혁

과장

오열상

부장

01/23

代김태중