“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	가설건축물 존치기간 연장 및 축조협의(도시계획시설사업 관련)

1. 중구청 건축과-25578(2018.12.17.)호 및 용산구청 건축디자인과-28871(2018.12.31.)호와 관련입니다.

2. 우리시에서는 남산 회현자락에서 발굴한 한양도성 성곽유구와 함께 이 일대를 현장 유적박물관으로 조성하여 한양도성의 축성기술과 발굴·보존과정 등을 체험할 수 있는 장소로 활용하고자 도시계획시설(공원)사업 실시계획을 고시(제2018-277호, 2018.9.13.)하였고 2018.12월 공사 착공을 위해 공사용 가설건축물을 축조하고자 귀 청과 건축법령에 따른 협의를 완료하였으나 현장여건상 공사기간이 연장되었으므로「건축법」제29조(공용건축물에 대한 특례)에 따라 아래와 같이 협의하오니 처리해 주시기 바랍니다.

《중구청장》

가. 위    치: 중구 회현동1가 100-267번지

나. 건 축 주: 서울특별시장

다. 협의사항

1) 가설건축물 존치기간 연장

- 개요: 연면적 108㎡, 지상1층, 공사용 임시사무실 및 창고

- 연장: 당초 2020.3.30. 변경 2021.12.30.

- 사유: 공사기한 연장에 따른 가설건축물 존치기간 연장필요

2) 가설건축물 축조(신규) 협의

- 개요: 연면적 48㎡, 지상1층, 2개동, 임시사무실, 컨테이너구조

- 기간: 2021.12.30.까지

《용산구청장》

가. 위    치: 용산구 후암동 30-66번지

나. 건 축 주: 서울특별시장

다. 협의사항(가설건축물 존치기간 연장)

- 개요: 연면적 108㎡, 지상1층, 공사용 임시사무실 및 창고

- 연장: 당초 2020.3.30. 변경 2021.12.30.

붙임 1. 중구청: 가설건축물 존치기간연장 신고서 및 축조신고서 각 1부

2. 용산구청: 가설건축물 존치기간연장 신고서 각 1부

3. 위치도(참고용) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중구청장(건축과장),용산구청장(건축과장)
주무관	왕승찬		도성관리팀장	정일선		한양도성도감과장	01/23 안중호
협조자
시행	한양도성도감-919	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	대시민공개