＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(서부수도사업소 비탈면(팔각정하부)보수보강공사)

우리사업소에서 시행중인 『서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약코자 합니다.

가. 공 사 명: 서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사

나. 사업개요: 기대기식옹벽, 낙석방지망 등

다. 공사기간: 2019. 10.14.~12.20.

라. 계약업체: ***************

마. 설계변경 사유: 공정추가 및 물량변경에 따른 설계변경

1) 주요공종 공사비 변경 내용

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
1. 토공 및 보강공	**********	**********	**********
2. 배수공	*********	*********	**********
3. 구조물공	**********	**********	*******
4. 부대공	**********	*********	***********
5. 자재비	**********	**********	**********
6. 숏크리트	*	**********	**********
7. 폐기물처리	*	*********	*********
부가세	**********	**********	**********
합 계	***********	***********	***********

2) 계약금액 변경(조정) 내용

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
도급액	***********	***********	***********

※ 준공지연에 따른 지체상금, 보험료 등 준공정산시 계상

바. 예산 과목

- (사고이월예산) 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1. 심의결과 보고서 1부.

2. 설계변경 심의 결과서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 검증확인서 1부.

5. 합의서 1부.  끝.

★주무관	방만천		행정관리팀장	강정환		행정지원과장	박달경		서부수도사업소장	01/23 박영헌
협조자	주무관	구자람
시행	행정지원과-1701	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)