★

문서번호	공원녹지과-544
결재일자	2020.1.9.
공개여부	대시민공개

담 당	조경담당	공원녹지과장	도시관리국장
손지연	김대호	김경욱	01/09 이계섭
협 조

삼양로 아름다운 가로수길 조성사업 추진계획

2020. 1.

도시관리국

(공원녹지과)

삼양로 아름다운 가로수길 조성사업 추진계획

열악한 보행환경과 여러 수종이 혼식되어 있고 수형불량목 등으로 미관이 나쁜 삼양로  일대의 구간을 보다 수형이 아름다운 가로수로 정비하여 쾌적하고 아름다운 가로경관으로 조성코자 함.  ※ “삼양로 문화예술 창업거리 조성사업”과 연계 추진(민선7기 우선추진 정책사업)

Ⅰ		사업개요

대 상 지 : 삼양로 (시도로)

사업기간 : 2020. 1. ~ 10.

사업내용 : 가로수 바꿔심기(양버즘, 은행 등 5종 → 이팝나무 128주), 보호판 정비 등

사 업 비 : 300백만원 (시비)  ※ 용역비 17백만원 / 공사비 283백만원

※ 단, 가로수 바꿔심기는 서울시 가로수 심의위원회 심의 등 사전 행정절차 이행이 필요하며, 심의결과에

따라 추진여부 결정 [「서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례」 제7조의 2(가로수 심의위원회) 관련]

Ⅱ		추진계획

중점 추진사항

○ 열악한 보행환경 및 수형불량목 등 가로수 재정비를 통해 보행환경 개선

○ 지역의 토질 등 생육환경에 적합한 가로수 수종 선정으로 가로경관 개선

추진방법 : 설계용역, 서울시 도시공원위원회 가로수 심의 후 공사 시행

○ 설계시행 : 조경설계 전문업체에 의뢰 시행

○ 공사시행 : 지역제한경쟁

○ 예산과목 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 녹지보전 강화, 가로수 생육환경 및

가로변 녹지량 확충, 시설비및부대비, 시설비(시비)

< 2019년 가로수 바꿔심기 사업 실적 >

○ 위    치 : 한천로 (장위사거리 ~ 동대문구 구계)

○ 사 업 비 : 290백만원 (시비)

○ 사업내용 : 가로수 바꿔심기 (양버즘, 은행 등 4종 → 이팝나무 99주) 등

	⇒
< 정비 전 >		< 정비 후 >

Ⅲ		추진일정

2020.  1. ~  2. : 사업추진계획 수립 및 기술용역 타당성 심사

2020.  3. ~  5. : 실시설계용역 및 도시공원위원회 심의

2020.  5. ~  6. : 계약심사 및 공사발주

2020.  6. ~ 10. : 공사시행 및 준공.

붙임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.