문서번호	치수과-402
결재일자	2020.1.13.
공개여부	대시민공개

주무관	치수담당		치수과장		건설교통국장
윤형철	김재준		김윤기		01/13 신수련
협 조

성북천 분수마루 정비공사 추진계획 보고

2020. 1.

건 설 교 통 국

(치  수  과)

성북천 분수마루 정비공사 추진계획 보고

성북천 분수마루는 수조형태로 되어 있어 내부로 추락위험이 있고 비가동 시기에는 공간만 차지하는 등 비효율적이므로 이를 바닥분수로 개선하고, 주변 환경을 전반적으로 재정비하기 위해 추진 중인 「성북천 분수마루 정비공사」에 대한 추진계획을 보고드림

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 성북천 분수마루 정비공사

□ 위    치 : 한성대입구역 분수마루

□ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 06.

□ 사업규모

○ 바닥분수 설치 A=80㎡

○ LED조명 및 물높이 조절기능 시스템 등 설치

○ 분수마루 주변환경 개선 1식

□ 총사업비 : 485백만원(전액시비)

Ⅱ		추 진 현 황

□ 2019. 03. : 바닥분수 설치 요청 민원에 따른 현장조사 및 설문조사 실시

○ 총 315명 참여

○ 설문조사 결과 : 바닥분수 설치(60%), 기존분수유지(40%)

□ 2019. 11. : 2020년 서울시 본예산 요청 및 반영

○ 요청액 : 500백만원, 반영액 : 485백만원

Ⅲ		보 고 내 용

□ 바닥분수 설치공사는 전문적 설계가 요구되며, 설치 위치가 성북천 복개구조물 상부로써 분수시설 설치로 인해 구조물에 영향을 주지 않도록 설계하여야 함

□ 분수마루 내 공간 재배치 등 전반적인 재정비 계획이 필요함

⇒ 원활한 사업추진을 위해서 실시설계 용역을 거쳐 별도 공사발주 시행하고자 함

Ⅳ		향후 추진계획

□ 2020. 01. ~ 02. : 실시설계용역 시행(수의계약)

○ 용역 준공 전 성북동 및 삼선동 주민의견 수렴(청취) 실시

□ 2020. 03. : 공사발주 및 착수

□ 2020. 06. : 공사준공

붙  임 : 사업구간 위치도 및 현황사진 1부.  끝.