투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	해동건설(주) 대표이사 박찬
(경유)
제목	계약금액 조정신청에 대한 회신

1. 해동 제2019-558(2019.12.16.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 사에서 요청한 “천호대로(광나루역) 확장공사”의 계약내용 변경에 따른 계약금액 조정 신청에 대하여 검토한 바, 이는 우리본부와 귀 사간 장기계약공사로 시행한 사업으로 최초 계약금액이 305억원이고 최종 준공금액이 579억원으로 정산되어 증액된 공사비 만큼 공사기간이 연장된 사항으로 “대법원 판례(사건번호 2014다235189)”에 의거 계약금액 조정은 불가한 사항입니다.

3. 또한, 제7차 계약분의 경우 최초 45억원으로 계약되어 최종 준공금액이 156억원으로 정산되어 증액된 공사비 만큼 공기연장된 사항으로, 귀 사에서 요청한 계약내용의 변경에 따른 계약금액 조정 신청에 대하여는 지급이 불가한 사항임을 알려드리니 양지하시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황윤기		교량건설과장	장종환		토목부장	전결 01/28 김용제
협조자	주무관	권해엽		주무관	노순재
시행	토목부-1803	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2577	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개