문서번호	설비부-1293
결재일자	2020.1.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
박경철	여인웅	전결 01/29 임정규

「남부도로사업소 청사 신축 자동제어설비 구매」 설계변경 검토보고

2020. 01.

도시기반시설본부

(설비부)

『남부도로사업소 청사 신축 자동제어설비 구매』

설계변경 검토보고

「남부도로사업소 청사 신축 자동제어설비 구매설치」관련하여, 조달청으로부터 재검토 반려된 자동제어설비 설계변경 사항에 대하여 재검토하고 그 결과를 보고 드림

1		납품개요

❍ 건    명 : 남부도로사업소 청사 신축 자동제어설비 구매설치

❍ 위    치 : 서울시 금천구 시흥3동 963-1 외 13필지

❍ 납품기간 : 2017.12.11. ~ 2020.01.30.

❍ 납품규모 : 지하1층/지상5층(연면적 5,361㎡)

❍ 계약금액 : *************

❍ 계약상대자 : *******

❍ 감 리 사 : ㈜삼우공간건축사사무소 외 1개사

2		관련근거

❍ 물품계약수정통보서(반려)[조달청********8900(2019.12.26.)호]

- ********************************

❍ 자동제어설비 구매 변경계약 재검토 보고[삼우 제20-0129(2020.01.29.)호]

3		설계변경검토보고 내용

❍ 설계변경 사유

- 원가절감 등을 고려한 효율적 시설관리를 위한 내역변경

❍ 주요 설계변경 현황

① 설계변경  금액                                          (단위:원)

구 분	변경 전	변 경 후	증․감	비 고
자동제어설비 구매	***********	***********	************

② 세부 설계변경 내역 및 금액                            (단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	증감액	설계변경 사유 및 변경내용
직접재료비	***********	***********	***********	▹원가절감 등을 고려한 효율적 시설관리를 위해 통합SI시스템 삭제
공급가액	***********	***********	***********
부가가치세	**********	**********	*********
합 계	************	***********	***********

❍ 책임건설관리사업기술자 검토의견

- 효율적이고 원활한 시설관리를 위해 통합SI시스템 삭제를 위한 계약상대자의           설계변경에 대한 요청내용이 재검토 결과, 적정하다고 판단됨

4		보고자 의견

❍ 원가 절감 등을 고려한 효율적 시설관리를 위한 책임건설관리사업 기술자의 검토보고 내용이 적정하다고 판단 되므로,

❍ 설계변경 내용을 계약부서(총무부)에 통보하여 설계변경 처리코자 함.

따로 붙임: 설계변경 관련 문서 1부.  끝