문서번호	급수운영과-1434
결재일자	2020.1.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강동수도사업소장
이덕규	代정준석	김태형		01/29 안병희
협 조
	주무관		박기련

2020년 강동수도사업소 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역 추진계획

2020. 1.

강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「2020년 강동수도사업소 송배수관 정비공사 상수도공사」

교통소통대책 수립 용역 추진계획

2020년도 우리사업소에서 시행 예정인 송배수관 정비공사 구간에 대한  교통소통대책 수립용역 계획을 아래와 같이 시행하고자 함.

Ⅰ		개 요

가. 용역명: 강동수도사업소 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역

나. 용역 대상 공사개요

공 사 명	교통소통대책 대상 구간	도로명
소 계	D=200~900㎜, L=1,700m
백제고분로 장기사용 송배수관 정비공사	D=200~900㎜, L=620m	백제고분로
올림픽로 장기사용 송배수관 정비공사	D=800㎜, L=1,080m	올림픽로

다. 용역비: 44,110천원

라. 용역기간: 착수일로부터 90일간

마. 용역개요: 상수도관 매설을 위한 이동식 도로점용 1,700m

바. 예산과목: 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비[내용연수 경과 취약관로(송배수관) 정비]

Ⅱ		용역내용

가. 용역목적: 도로 점용공사로 인한 시민불편 최소화 및 교통대책의 실효성 확보

나. 추진근거: 서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례(제3조)

다. 과업범위: 간선도로 1,700m 상수도관로 매설을 위한 이동식 도로 점용

라. 주요과업 내용

○ 교통소통대책 계획 요약서

○ 사업지 주변 교통시설 설치계획 및 교통관련 계획

○ 교통현황 및 분석

○ 공사로 인한 교통영향 분석

마. 용역 대가 산출근거: 실비정액가산방식

○ 교통관련계획 표준품셈(한국교통기술사협회)에 의해 산출된 투입인원에 대하여 적정 인원으로 투입비율 조정

Ⅲ		추진계획

가. 2020. 1월: 교통처리 용역타당성 심사요청(사업소→市 기술심사담당관)

나. 2020. 2월: 심사결과에 의거 용역발주(사업소)

다. 2020. 2월: 용역착수(착수일로부터 90일)

라. 추진 절차

○ 기술용역 타당성심사(市 기술심사담당관)

○ 용역발주 및 계약(수도사업소)

○ 성과품작성(계약업체)

○ 교통소통대책 심의회 심의 · 승인(市 교통운영과)

○ 관할 경찰서 심의 · 승인

○ 공사착공(수도사업소)

붙임  1. 설계내역서 및 교통용역수립용역설명서 각1부.

2. 과업지시서 및 기술용역타당성 심사요청서 각1부.  끝.