국회의원 요구 자료 제출

시 행	물재생시설과-1214	(		)
접 수		(		)
결재일자	2020.1.30.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,물순환정책과장

주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장	물순환안전국장		결재
전원석	노정현	윤창진	전결 01/30 이정화
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 104번, 김성태 의원, 행정안전위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김성태 의원(행정안전위원회, 자유한국당)

□ 요구번호 : 104

1. 물재생센터 수소연료전지 설치

서울 물재생센터 수소연료전지 설치사업 개요 및 향후 추진계획

서울시 물재생센터 수소연료전지 설치사업 개요 및 향후 추진계획은 아래와 같습니다.

□ 사업개요

서울시 물재생센터의 소화가스(바이오가스)를 활용한 수소연료전지 중심의 신재생에너지 환상망을 구축하여 대기오염물질 배출이 없는 물재생센터로 전환

○ 사업규모 : 연료전지 총 180MW(중랑 50, 탄천 40, 서남60, 난지30)

○ 사업기간 : 2020.1 ~ 2035.12

※ 중랑 물재생센터 30MW 시범사업 검증후 연차별로 추진

○ 추진방법 : 도시가스 사업자와 업무협약 체결 등 협업

- 서울시 : 사업부지 제공, 행정지원

- 사업자 : 연료전지 등 시설물 설치, 재원투자, 관리·운영

○ 주요내용

- 바이오가스를 연료전지 원료로 사용하여 전기 및 열에너지 생산·활용

- 바이오가스 활용 증대를 위한 시설 및 운영관리 시스템 개선

- 바이오가스 활용 중 발생하는 열 및 온실가스 포집하여 도시농업 등에 활용

	중랑물재생센터 시범사업 추진
￭ 사업위치 : 중랑물재생센터(관리동 인근) ￭ 사업기간 : ‘20.1 ~ ’21.12 ￭ 사업규모 : 30MW(약 1,800억, 민간투자)

바이오가스 정제시설 가동중인 중랑센터에 시범사업을 우선시행하고 효과분석 등 검증 후 증설 및 물재생센터 전체로 확대구축

□ 향후 추진계획

○ 중랑물재생센터 시범사업 시행 : 2020년 ~ 2021년

- 사업자 선정 및 실시협약 체결 : 2020.2 ~ 2020.7

- 시설 착공 및 준공 : 2020.7 ~ 2021.12

- 사업효과 검증 및 보완 : 2022.1 ~ 12

○ 4개 물재생센터 확대 : 2023년 ~ 2035년

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물재생시설과)	담당사무관	노 정 현
	☎ 2133-3836	담당자	전 원 석
	작 성 일 : 2020.1.29