문서번호	설비부-1322
결재일자	2020.1.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	01/30 임정규
협 조

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 - 관급자재 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 01.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 -

관급자재 설계변경 검토보고

『중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사』관련 총인처리시설 전기공사 관급자재(전동기제어반, 배전반)에 대하여 자동소화설비 추가 등의 사유로 건설사업관리단으로부터 설계변경 서류가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

********************************************

***************************************

*******************************

************************************

*******************************

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사

공사위치 : 성동구 자동차시장3길 64번지 중랑물재생센터

공사내용 : 총인처리시설(412,000㎥/일)에 따른 전기공사 1식

공사기간 : 총차 ‘17. 11. 24. ~ ‘20. 7. 31.(2차 ‘18. 12. 11. ~ ‘20. 7. 31.)

도 급 비 : ************************************

도 급 자 : ***************

감 리 자 : *********

Ⅲ
		관급자재 계약현황

계약현황

구분	계약번호	계약자	계약금액	납품기한
전동기제어반	***********	*****	************	‘20.6.30.
배전반	***********		**************

Ⅳ
		검 토 내 용

변경사유

구분	변경사유	비고
전동기제어반	********************************* *********************************************** ************************************* ************************************* ************************************ ****************************************** ************* *********************************************** ****************************************** *************************************** ************************************** **************** ******************************************* ********************************************	**** **
배전반	******************************* *************************	**********

변경금액                                             [단위 : 원]

구분	변경 전	변경 후	증ㆍ감	비고
전동기제어반	***********	***********	***********
배전반	*************	*************	***********

변경 세부항목

〇 전동기제어반                                                  [단위 : 원]

명 칭	규격	단위	수량	단가	금액	증□감액	비고
LOP (현장조작반)	******	*	*	*******	*********	*********	***** *****
	******	*	*	*******	*********
LOP (현장조작반)	******	*	**	*******	**********	********	***** *****
	******	*	**	*******	*********
LOP (현장조작반)	******	*	**	*********	**********	***********	***** *****
	******	*	**	*********	**********
LOP (현장조작반)	******	*	*	*********	*********	**********	***** *****
	******	*	*	*********	*
MCC-400 (전동기제어반)	****************	***	*	**********	**********	*******	*****
	****************	***	*	**********	**********
MCC-401 (전동기제어반)	****************	***	*	*********	*********	*******	*****
	****************	***	*	*********	*********
LV-3(개량)	******	*	*	*******	*******	********	**** **
	*	*	*	*******	*
LV-6(개량)	******	*	*	*********	*********	**********	**** **
	*	*	*	*********	*
MCC-500 (전동기제어반)	****************	***	*	**********	**********	**********	*********** *******
	****************	***	*	**********	**********
MCC-600 (전동기제어반)	****************	***	*	**********	**********	**********	*********** *******
	****************	***	*	**********	**********
MCC-3M-101개량(A/B)	*******	*	*	*******	*******	*********	******** *******
	*******	*	*	*********	*********
하부지지대	******	*	*	*********	*********	**********	******
	******	*	*	*********	*********
LC-B7(개량)	********	*	*	*	*	*********	******
	********	*	*	*********	*********
소 계						***********
부가가치세		*	*			**********
합 계						***********

〇 배전반                                                        [단위 : 원]

명 칭	방호체적 (㎥)	적용소화기	단위	수량	단가	금액	비고
HV-M3,M4	****	*******	*	*	*******	*********	******
EHV-1,2	****	*******	*	*	*******	*********	******
EHV-3,4	****	*******	*	*	*******	*********	******
MTR-1,2	*****	********	*	*	*********	*********	******
MV-1,2	****	*******	*	*	*******	*********	******
MV-3A/3B	****	*******	*	*	*******	*******	******
MV-4A/4B	****	*******	*	*	*******	*******	******
SC-1,2	****	*******	*	*	*******	*********	******
NGR-1,2	****	*******	*	*	*******	*********	******
STR-1,2	*****	********	*	*	*********	*********	******
LV-1,2	****	*******	*	*	*******	*********	******
LV-3	****	*******	*	*	*******	*******	******
LV-4	****	*******	*	*	*******	*******	******
LV-5~12,14~22	****	*******	*	**	*******	*********	******
LV-13	****	*******	*	*	*******	*******	******
DC-AR	****	*******	*	*	*******	*******	******
총인처리시설			*	**	*	**********
유입펌프동			*	**	*	*********
소 계			*	**		**********	*****
부가가치세			*	*		*********
합 계						***********

Ⅴ
		검 토 의 견

건설사업관리단 검토의견

***************************************************************************************

**********************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************

*****

********************************************************************************************************

*****************************************

*******************************************************

**************************************

****************************************