문서번호	시설보수과-788
결재일자	2020.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승훈		代윤동원	01/30 박문희
협 조
	주무관			윤동원
	주무관			강연홍
	주무관			김규춘
	주무관			조정갑

2020년 도로시설물 안전 및 유지관리계획 수립 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020년 도로시설물 안전 및 유지관리계획 수립 보고

우리 사업소에서 관리하는 도로시설물에 대한 2020년도 안전 및 유지관리계획을 수립․시행함으로써 각종 재난예방과 시설물의 효율성 증진 및 안전성 확보에 기여코자 함

Ⅰ		관 련 규 정

법적근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조, 시행령 제3조, 동법 시행규칙 제3조

□ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제6조

□ 재난 및 안전관리 기본법 제27조 및 동법 시행령 제34조2

계획의 수립 및 제출

□ 시설물의 관리주체는 안전 및 유지관리계획을 수립하고 시장에게 제출

□ 3종이상 시설물의 관리계획 및 실적은 시설물 정보관리종합시스템에 입력

Ⅱ		점검실시 기준

구분	정기안전점검	정밀안전점검			정밀안전진단
대상	1,2,3종 및 법정외 시설물				1종시설물 (완공후 10년이 지난시설물)
점검 주기	반기별 1회	안전등급 A등급	안전등급 B․C등급	안전등급 D․E등급	- 6년 / 1회 이상 (안전등급 A등급) - 5년 / 1회 이상 (안전등급 B ․ C등급) - 4년 / 1회 이상 (안전등급 D ․ E등급) - 안전점검 실시 결과, 관리주체가 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 판단시
		3년 / 1회이상	2년 / 1회이상	1년 / 1회이상

Ⅲ		시설물 현황

(단위 : 개소)

종별	합계	일반교량	고가차도	입체교차로	지하차도	터널	복개구조물
계	65	22	6	6	22	5	4
1종	7	-	-	-	2	4	1
2종	21	6	3	2	9	1	-
3종	17	1	1	1	11	-	3
법외	20	15	2	3	-	-	-

Ⅳ		안전 및 유지관리 계획

조직․인원․장비 확보 현황

□ 조직

				강서도로사업소장
				시설보수과장(점검총괄)
	1조(강연홍,조정갑)			2조(윤동원,조정갑)			3조(김규춘,이승훈)
	직영 보수반(박태준,한상윤,김정민,강성훈)

□ 인원(총 10명) : 점검 6명(과장 1명, 직원 5명) / 직영보수 4명(공무직)

□ 장비

장비명	점검용 차량	작업차 (지원)	안전모	점검 카메라	사다리	점검 망치	점검 망원경	균열 게이지	기타
계(38)	1대	1대	20개	3개	1개	5개	1개	5개	1개

긴급상황 발생시 조치 체계

□ 시설물안전법 시행령 제18조(중대한 결함)에 의한 긴급 보수가 필요한 경우

□ 긴급조치 체계도

	서울특별시장 (2133-6061)
	(보고)
	안전총괄실 (2133-8000)
	(보고)
	안전총괄관 (2133-8005)
	(보고)			유관기관 (경찰서, 소방서, 병원)
		(협조요청)
	도로시설과, 교량안전과 (2133-1650, 1940)
	(보고)
	강서도로사업소장 (2657-7910)
	(보고)
	- 시설보수과장:2657-7940 - 담 당 자 : 2657-7971~8 - 당직실(야간): 2657-7900		(긴급사항 발생)

설계도서의 수집 보존 현황

연번	구분	시설물명	설계도서	시공도서	감리도서	유지관리도서	보관장소
1	일반 교량 (22개소)	목동교	○	○	×	○	자료실보관(FMS 등)
2		신정2교	○	○	×	○	〃
3		오목교	○	○	×	○	〃
4		고척교	○	○	×	○	〃
5		서울교	○	○	×	○	〃
6		여의2교	○	○	×	○	〃
7		가족길교	○	○	×	○	〃
8		행주1교	○	○	×	○	〃
9		행주2교	○	○	×	○	〃
10		개화교	○	○	×	○	〃
11		개봉교	○	○	×	○	〃
12		광명교	○	○	×	○	〃
13		도림교(구로)	○	○	×	○	〃
14		구로1교	○	○	×	○	〃
15		신정교접속교	○	○	×	○	〃
16		광복교	○	○	×	○	〃
17		역곡천교	○	○	×	○	〃
18		선유교	○	○	×	○	〃
19		여의하류2교	○	○	×	○	〃
20		행주IC교	○	○	×	○	〃
21		개화램프B교	○	○	○	○	〃
22		오금교접속교	○	○	×	○	〃
23	고가 차도 (6개소)	개봉	○	○	×	○	〃
24		가리봉철도	○	○	×	○	〃
25		개봉철도	○	○	×	○	〃
26		화곡	○	○	×	○	〃
27		오류철도	○	○	×	○	〃
28		가마산	○	○	×	○	〃
29	지하 차도 (22개소)	오금	○	○	×	○	〃
30		구로	○	○	×	○	〃
31		외발산	○	○	○	○	〃
32		공항입구	○	○	×	○	〃
33		등촌	○	○	×	○	〃
34		오목	○	○	×	○	〃
35		신도림	○	○	×	○	〃
36		가마산	○	○	×	○	〃
37		국회앞	○	○	×	○	〃
38		서부트럭터미널	○	○	○	○	〃
39		성산	○	○	×	○	〃
40		오목교서측	○	○	×	○	〃
41		서울교접속	○	○	×	○	〃
42		구로역	○	○	×	○	〃
43		개화	○	○	×	○	〃
44		목동교서측	○	○	×	○	〃
45		고척2	○	○	×	○	〃
46		노들길	○	○	×	○	〃
47		여의2	○	○	×	○	〃
48		여의하류	○	○	×	○	〃
49		오목교동측	○	○	×	×	〃
50		개봉	○	○	○	○	〃
51	입체 교차로 (6개소)	영등포RIC	○	○	×	○	〃
52		공단IC	○	○	×	○	〃
53		개화IC	○	○	×	○	〃
54		시흥IC	○	○	×	○	〃
55		신월IC	○	○	×	○	〃
56		오류IC	○	○	×	○	〃
57	터널 (5개소)	화곡	○	○	×	○	〃
58		궁동	○	○	○	○	〃
59		작동	○	○	○	○	〃
60		생태	○	○	○	○	〃
61		범벅	○	○	○	○	〃
62	복개 구조물 (4개소)	도림천(좌안)	○	○	×	○	〃
63		개화천	○	○	×	○	〃
64		염창IC하부	○	○	×	○	〃
65		도림천하류	○	○	×	○	〃

안전점검 및 정밀안전진단 실시계획 현황

연번	구분	시설물명	연도별 점검주기 현황					비고
			2016	2017	2018	2019	2020
1	일반 교량 (22개소)	목동교	□○	□	□○	□★	□
2		오금교(신정2교)	□○	□	□○	□	□○
3		오목교	□○	□	□○	□	□○
4		고척교	□	□○	□	□○	□
5		서울교	□	□○	□	□○	□
6		여의2교	□○	□	□○	□	□○
7		가족길교					□△
8		행주1교	□○	□	□○	□	□○
9		행주2교	□○	□	□○	□	□○
10		개화교	□○	□	□○	□	□○
11		개봉교	□○	□	□○	□	□○
12		광명교	□○	□	□○	□○	□
13		도림교(구로)	□○	□	□○	□	□○
14		구로1교	□	□○	□	□○	□
15		신정교접속교	□○	□	□○	□	□○
16		광복교	□○	□	□○	□	□○
17		역곡천교	□	□○	□	□○	□
18		선유교	□	□	□○	□	□○
19		여의하류2교	□	□△	□	□○	□
20		행주IC교	□○	□	□○	□	□○
21		개화램프B교			□	□○	□
22		오금교접속		□	□○	□	□○
23	고가 차도 (6개소)	개봉	□	□○	□	□○	□
24		가리봉철도	□○	□○	□	□○	□★
25		개봉철도	□○	□○	□	□○	□○
26		화곡	□○	□	□○	□	□○
27		오류철도	□○	□	□○	□	□○
28		가마산	□○	□	□○	□	□○
29	지하 차도 (22개소)	오금	□○	□	□○	□	□○
30		구로	□○	□	□○	□	□○
31		외발산	□★	□	□○	□	□○
32		공항입구	□	□○	□	□○	□
33		등촌	□○	□	□○	□	□○
34		오목	□○	□	□○	□	□○
35		신도림	□	□○	□	□○	□
36		가마산	□○	□	□○	□	□○
37		국회앞	□○	□	□○	□	□○
38		서부트럭터미널	□	□○	□	□○	□
39		성산	□○	□	□	□	□○
40		오목교서측	□	□○	□	□○	□
41		서울교접속	□	□○	□	□○	□
42		구로역	□○	□	□○	□	□○
43		개화	□○	□	□○	□	□○
44		목동교서측	□○	□	□○	□	□○
45		고척2	□○	□	□○	□	□○
46		노들길	□	□○	□	□○	□
47		여의2	□○	□	□○	□	□○
48		여의하류	□○	□	□○	□	□○
49		오목교동측	□	□○	□	□○	□
50		개봉	□	□	□○	□	□○
51	입체 교차로 (6개소)	영등포RIC	□	□○	□	□○	□
52		공단IC	□○	□	□○	□	□○
53		개화IC	□○	□	□○	□	□○
54		시흥IC	□	□○	□	□○	□
55		신월IC	□	□○	□	□○	□
56		오류IC	□	□○	□	□○	□
57	터널 (5개소)	화곡	□○	□	□○	□	□○
58		궁동	□★	□	□○	□	□○
59		작동	□★	□	□○	□	□○
60		생태	□	□○	□	□	□○
61		범박	□	□○	□	□	□○
62	복개 구조물 (4개소)	도림천(좌안)	□○	□	□○	□★	□
63		개화천	□○	□	□○	□	□○
64		염창IC하부	□	□○	□	□○	□
65		도림천하류	□	□○	□	□○	□

※ 정기점검(□), 정밀점검(○), 정밀안전진단(★), 하자점검(△)

안전점검 및 유지관리 예산 확보 계획

□ 소요예산 확보 계획

- 보수에 많은 예산 필요시 : 단위사업으로 편성

- 공사비가 소액이거나 경미한 손상 등 : 일상유지보수 예산으로 편성

□ 안전점검 결과 조치

- 안전점검 실시결과 긴급사항 : 당해연도 예산에서 조치

- 공사비 소액 : 일상유지보수공사 등을 통해 조치

- 그 외 긴급하지 않고, 많은 예산 필요시 : 익년도 예산 편성 조치

□ 소요예산 조치현황

- 안전점검, 진단 예산(최근 3년간)                           (단위 : 천원)

구 분	계	‘17년	‘18년	‘19년
계	2,178,982	489,763	775,564	913,655
정기점검	-	자체점검	자체점검	자체점검
정밀점검	1,789,267	489,763	775,564	523,940
정밀안전진단	389,715	-	-	389,715

- 유지관리 예산(최근 3년간)                            (단위 : 천원)

구 분	계	‘17년	‘18년	‘19년
보수 ․ 보강공사	24,368,631	6,276,846	8,677,000	9,414,785

Ⅴ		행 정 사 항

2020.2.15.까지 시설물의 안전 및 유지관리계획(총괄), 점검진단계획을 시설물정보관리종합시스템(FMS)에 입력 조치 : 1,2,3종시설물

점검계획 수립 및 관련부서 통보

- 관련부서 : 도로시설과 안전점검 계획을 반영한 세부계획을 수립 시행

정기점검은 시설물 담당자가 연간 점검계획을 참고하여 일정 수립후 시행

붙임 : 20년도 담당자별 시설물 유지관리계획 5부(2부 별첨).  끝.