투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 공사기간 3차 연장승인 통보(가양더리브 골드퍼스트)

1. 귀 사(기관)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 과련근거

가. 교통관리과-18830(2019.07.24.)호

나. 제eTEC가양-2020-005호

다. 대영전기감 GE20C-01-13(2020.01.13.)호

3. 위 호와 관련한 『교통안전시설물 설치공사 공사기간 3차 연장요청』에 대하여 아래와 같이     승인함을 통보합니다.

가. 공 사 명 : 가양더리브 골드퍼스트 신축공사 중 교통안전시설물 설치공사

나. 공사장소 : 강서구 양천로 400-12 주변

다. 공사내용 : 교통신호기(차) 이ㆍ신설 및 지주통합(신호등＋가로등)

라. 원 인 자 : 이테크건설

마. 연장사유 : 토목공사 지연 및 동절기 도로굴착 불가로 인한 공사기간 연장

바. 공사기간 연장승인 내용

구 분	승 인 전	승 인 후	비 고
공사기간	2019.9.25. ~ 2019.12.31.	2019.9.25. ~ 2020.7.30.	211일 증

붙임 : 공사기간 연장요청(감리사 검토의견서 포함) 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	이테크건설 대표,대영유비텍(주) 대표,서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울강서경찰서장(교통과장),서울특별시장(교통운영과장),강서구청장(도로과장)
주무관	이성도		기전과장	전결 01/30 서승완
협조자
시행	기전과-834	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	lsd2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)