문서번호	투자창업과-1210
결재일자	2020.1.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	창업기반조성팀장	투자창업과장
신재영	고중석	01/30 최판규

「서울창업카페 낙성대점 조성 전기공사」 준공기한 연장 보고

2020. 1

투자창업과

「서울창업카페 낙성대점 조성 전기공사」준공기한 연장 보고

「서울창업카페 낙성대점 조성 전기공사」추진과 관련하여, 조성지인 낙성대 역사 내 시설물 이전협의 등의 추가기간 소요로 준공기한을 연장하고자 함

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 서울창업카페 낙성대점 조성 전기공사

❍ 용역기간 : ******************

❍ 계약금액 : *********************

❍ 용역업체 : *********

❍ 과업내용 : 서울창업카페 낙성대점 조성 전기공사

□ 준공기한 연기

구 분	기 정	변 경	비 고
용역기간	***************	****************	증12일

❍ 연기 사유

- 조성지인 낙성대 역사 내 서울교통공사 시설물(소화전, 전기분전함, 무인     도서관, ATM기, 만남의 장소 등) 이전협의 등에 따른 업무처리 기간이 필요

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

□ 조치계획

❍ 준공기한을 연기하여 과업수행에 차질이 발생하지 않도록 추진

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.