문서번호	기반시설과-250
결재일자	2020.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
임영준	代정창수	01/31 代손창열

한강수상갤러리 조성사업 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 1.

서울시한강사업본부

(기반시설과)

한강수상갤러리 조성사업 추진 계획

시설 노후화 및 운영비 과다로 2015년 1월부터 운영중단된 월드컵분수를 재구조화하여 한강수상갤러리로 조성 시민이 함께 즐길 수 있는 수변공간 확보에 최선을 다하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

❍ 월드컵분수 활용방안 검토보고(행정2부시장방침 제26호,2019.1.30)

- 안전조치 및 한강역사문화전시관(한강水갤러리)으로 기능전환

❍ 한강 프로젝트 시장보고(행정2부시장방침 제239호,2019.9.2)

- 월드컵분수를 재활용한 한강수상갤러리 조성

Ⅱ		추 진 경 위

❍ 2014.11.11. : 월드컵분수 운영중단 보고(행정2부시장 방침)

- 운영비용 과다 및 노후로 2015년부터 운영중지

❍ 2015.03.20. : 운영관련 시민여론 조사

- 지속운영 : 부정적(51.9%), 활용방안 : 용도변경(47.1%)

❍ 2016.4 ~ 2017.10. : 월드컵분수 활용방안 검토

- 원상복구 및 기능전환 등에 대하여 10회이상 회의하였으나 미결론

❍ 2018.5.23. : 월드컵분수 설계용역 시행

- 시설물 진단결과 안정성 확보가 필요하고 원상복구 비용(89억원)이 과다하여 한강수상갤러리로 조성하는 것이 적정

❍ 2019.6.20. : 한강시민위원회 기획위원회 개최

- 월드컵분수 재활용은 한강 관련 내용이 반영되도록 계획

❍ 2019.9.3. : 제289회 시의회 임시회 보고

- 2020년도 한강수상갤러리 조성 사업비(39.5억원) 편성

❍ 2020.1.15. : 설계공모 의뢰(한강사업본부 → 도시공간개선단)

Ⅲ		사업추진 계획

기본계획(안)

❍ 한강수상갤러리 1개소 조성

- 규모 : 직경 21m, 높이 10m,

지하(수심부)1층/지상(수상부)1층

- 기간 : 2020.1~2022.4

- 사업비  : 39.5억원

- 공간구성 계획

위치별		실 내		실 외
		1층(F1)	지하(B1)
기 본 방 향		한강을 알고 (한강 水 역사‧문화전시)	한강을 느끼며 (한강 水 생태공간)	한강을 교감하다 (한강 水 체험공간)
도 입 시 설	벽 면	한강역사‧문화 전시실	한강 생태 전시실	옥 상	기존 대형노즐을 활용한 전망대
	중앙홀	돔형 천정을 활용한 한강 3D 영상관	한강 관련 이벤트 행사장	외 곽	카페테리아, 인력 한강 분수대
	바닥면	홀로그램을 활용한 전시물관	기존 배관을 활용한 한강어류 전시	외 부 (신설)	투명 한강 물 맞이길,포토존 설치

추진방법 : 설계공모

❍ 공모범위 : 한강수상갤러리 조성 기본 및 실시설계 용역

❍ 공모방식 : 일반경쟁공모

❍ 참가자격 : 건축, 선박(조선), 디자인 관련 전문가

※ 향후 운영위원회를 구성하여 참가자격 등 확정

❍ 인센티브 : 당선작 설계권 부여 및 그 외 입상작 차등 보상금 지급

❍ 운영위원회 구성(안)

- 도시공간개선단에서 설계공모 전반에 걸쳐 직접 수행

- 운영위원회 구성 : 7인(PA 1, 건축 2, 조선 2, 수자원 1)

- 운영방법 : 필요시 수시 개최

❍ 심사위원회 구성(안)

- 심사위원회 구성 : 6인(심사 5인+ 예비 1인)

‧ 추천방법 : 운영위원회 또는 관련단체 추천

‧ 선정방법 : 운영위원회 우선순위 검토후 선정

- 심사방법 : 구성 후 논의를 통해 심사방법 의결

Ⅲ		향후계획 및 행정사항

향후계획

❍ ‘20.1. ~ 4. : 설계(현상) 공모

- 운영 및 심사위원회 구성‧개최, 지침서 작성, 당선작 심사 및 선정

❍ ‘20.5. ~ 10. : 계약 및 설계완료

❍ ‘20.10. ~ 11. : 공사발주

❍ ‘20.12. ~ ’22.4. : 공사시행 및 시민개방

행정사항

참여주체	업무분장	비 고
도시공간개선단	설계공모 추진 운영 및 심사위원회 구성 공모관리용역 시행 및 관리‧감독
한강사업본부	과업내용서 작성 사전절차 이행 사업추진 관련사항 협조