문서번호	시설보수과-360
결재일자	2020.1.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		임준빈	01/31 정훈모
협조
	주무관		이석근

2020년도 차집관로 준설공사

발주및 준설계획

2020. 01.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2020년도 차집관로 준설공사 발주 및 준설 계획

우리센터의 중랑, 청계 및 뚝도 배수구역의 차집관거내 퇴적물을 적기에 준설하여 원활한 하수 처리 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

1		공사개요

가. 공 사 명 : 2020년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가계약)

나. 예 산 액 : 800백만원

다. 공사기간 : 2020.02. ~ 2020.12.

라. 공사내용 : 준설(V=4,340㎥), 준설토처리 등

마. 예산과목

- 사업명 : 중랑물재생센터 공통분야 유지보수

사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

수계	준설구역	연장(m)	맨홀개소		비고
			작업구	물막이
계		7,415	25	20
청계	1구역	2□2.5*2.8 L=1,720m	6	4	신답철교밑~1처리장유입수문
	2구역	2□2.4*2.4 L=303m	4	4	1처리장유입수문~행단노선횡단부
	3구역	3□3.3*3.3 L=175m	6	6	행단노선횡단부~장안교하류
	4구역	3□3.5*3.5 L=150m	6	4	장안교하류~군자교방향150m
	5구역	2□2.4*2.4 L=550m	3	2	정릉천합류부~신답철교밑
	소계	6,321	25	20
행당 노선		1,094	6

바. 준설구간 현황

센터	#3,#4 (유입동)	W=4.0×L=51×H=3.3 W=4.0×L=23.5×H=6.0	-		#3 및 #4처리장
	자양노선 (유입동)	□2.8*2.1 L=10m	-		자양펌프장

2		년도별 준설현황

(단위 : ㎥)

센터명	평균	2015	2016	2017	2018	2019	적 용
설계물량	3,774	4,600	3,450	3,207	3,443	4,186	4,340
준설량	5,663	4,492	4,292	3,762	5,558	10,212

3		준설방법 및 준설토 처리계획

가. 준설방법

○ 기계준설(로더 및 백호), 인력 및 윈치준설 시행

- 2020년 준설 예정물량 : V=약4,340㎥

나. 준설토 처리

○ 유상처리 : 준설토 운반처리용역 별도 발주

※  준설토 야적 반출시 환경오염 시설구비 및 민원발생 최소화 추진

4		준설시기 및 준설량 산정방법

단위:㎥

준설장소	준설시기	준설방법	준설 예정량	산정방법	비고
청계1구역	5월과 10월 2회 실시	기계준설(야간)	900	야적장에 적치 물기제거후 센터 및 업체 적은 계근물량으로 정산	자전거 도로 등
청계3구역	5월과 10월 2회 실시	기계준설(주간)	700	〃
청계4구역	5월과 10월 2회 실시	기계준설(주간)	600	〃
청계5구역	5월과 10월 2회 실시	기계준설(야간)	500	〃	자전거 도로 등
청계(우안)	3월과 10월 2회 실시	기계준설(야간)	970	〃
중랑3구역	4월부터 11월 1회 실시	버켓준설	100	〃	응봉빗물~성동교
센터내	수시로 확인하여 준설	인력+리어커	100	〃	U형수로
백운동천	수시로 확인하여 준설	흡입+소운반	50	〃	U형수로
유입동 침사지	수시로 확인하여 준설	인력 +윈치/엔진	410	〃	센터 자양노선
흄관준설	민원발생 등 수시로 확인하여 준설	흡입준설 +소운반	10	〃	센터 자양노선
계			4,340

5		발주방법 및 소요예산

가. 제한경쟁입찰(지역제한)

나. 입찰참가 조건

- 상하수도 설비공사업 면허소지자중 서울시에 주된 사업소가 있는 업체

※ 건설산업기본법 제8조 및 시행령 8조

다. 소요예산 : **********

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

6		향후계획

가. 2020. 1월 : 계약심사의뢰 및 공사발주

나. 2020. 2월 : 공사계약 및 착공, 현장조사

다. 2020. 3월 ~ 12월 : 준설 시행 및 정산준공 실시

붙임 : 1. 공사설명서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 지침서 1부.

4. 청계천 및 중랑천 준설구간 위치도 1부.  끝.