준공(기성)검사조서(서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사-최종))

문서번호	행정지원과-2325
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	★주무관		행정관리팀장		행정지원과장
		방만천		강정환		02/04 박달경

공 사 명

서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사-최종

계 약 자

******** 대표 ***

계약금액

*************

금회기성액

************

계약일자

2019년 10월 11일

준공기한

2019년 12월 20일

착공일자

2019년 10월 14일

기성준공일

2020년 02월 04일

기성검사일

2020년 02월 04일

정산기간

2019년 12월 21일 ~ 2020년 02월 04일

전 기성금액	금회(최종) 기성금액	기성누계	지체상금부과액	위 공사에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.
**********	**********	***********	*********

2020년 02월 04일

현장감독공무원

행정지원

과

공업 7급

직

성명

방만천

검   사   자

행정지원

과

행정 9급

직

성명

전예담

전예담

검   사   자

행정지원

과

행정 8급

직

성명

유수훈

유수훈

❍ 금회 기성 및 지출금액 세부내역

구 분	금 액(원)	비 고
금회(최종) 기성금액	40,811,100
지체상금부과액	-3,802,830	46일
정산(최종)금액	37,008,270

서부수도사업소재무관 귀하

붙임  1. 준공사진 1부.

2. 준공사진 1매.

3. 준공도면 1부.

4. 준공검사시행 1부.  끝.